문서번호	건축부-20241
결재일자	2022. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		代조은주	03/25
			代차무흥
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 계약변경 검토보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(건  축  부)

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 계약변경 검토보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」와 관련, 건설사업관리용역 계약변경(계약금액) 요청이 있어 검토 후 보고드림.

*******************************************************

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사건설사업관리용역

□ 기    간 : '21.02.01.~'22.6.14. (총차:‘19.04.01.~'22.6.14.)

□ 용역금액 :  금1,233,241,000원 (총차:금2,226,617,000원)

□ 용 역 자 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소(대표:박재형) 외 1

	건립개요
위 치 : 마포구 백범로31길 21 (舊 한국산업인력관리공단 부지) 규 모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡ (서울창업허브단지 조경공사 포함) 총사업비 : 332억 (공사비 293억, 감리비 22억, 설계비 12.5억, 기타 5) ※ 어르신복지과 292.54억, 투자창업과 39.5억 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2022. 6. 14. (38개월) 용 도 : 노유자시설(노인복지시설)

Ⅱ		추진경위

□ 2019.04.01. : 제1차 용역착수(계약체결: ‘19.03.19.)

□ 2019.07.05. : 제1회 변경계약체결(공정에 따라 상주감리원 배치 조정)

□ 2020.03.02. : 제2회 변경계약체결(안전감리원 추가 배치 등)

□ 2020.06.02. : 제2차 용역착수

□ 2020.08.24. : 제3회 변경계약체결(물가변동에 따른 계약금액 조정)

□ 2021.02.01. : 제3차 용역착수

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

- 건설사업관리용역 변경계약 요청

(유탑관리팀-22-314 22.3.16.)

□ 변경사유 : 기계공사 연장에 따른 기계건설기술자 투입연장

- 기계공사 준공기한 연장: `22.3.14→`22.4.29

- 배치연장: 기계분야 손부호(중급) (추가배치:`22.3.15~`22.4.29)

□ 계약내용 변경: 계약금액 증가

구분		당초	변경	증감	비고
**	****	*******************	*******************	*
	*****	**************	*************	**************
**	****	*******************	*******************	*
	*****	**************	**************	**************

Ⅳ		처리의견

□ 건설사업관리용역 투입인월수 증가에 따른 계약금액 변경요청 사항이므로 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리용역 변경 계약 요청 1부.

2. 합의각서 1부.