문서번호	급수운영과-20393
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최형석	이연창	성기선	03/28
			代추경민
협 조
	주무관			손현정

배급수관 정비공사 발주계획

(월촌초등학교 주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등		■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

배급수관 정비공사 발주계획

2022년 장기사용 배급수관 정비사업과 관련 「월촌초등학교 주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사」에 대하여 본부 계약심사를 완료하고 아래와 같이 발주하여 공사를 시행코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 월촌초등학교 주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 착공일로부터 150일간

○ 공사위치 : 월촌초등학교 주변 외 4개소

○ 공 사 비 : 689,300,000원

구 분	금 액 (원)	비 고
총 공 사 비	689,300,000
도 급 비	290,000,000	심사결과 금액
관 급 비	145,200,000
복구비 및 기타	254,100,000

○ 공사개요 : 배급수관 부설 D=20~300mm, L=795m

구간	공 사 위 치	공사개요		도로 종류	비 고
		구경(mm)	총연장(m)
소 계	5개 구간	100~300	688
1구간	신월동 133-31~134-1	150	164	A-2
2구간	신정동 127-71~1278-1	150	194	A-2
3구간	목동 125-80~131-63	100	145	A-2
4구간	목동 901-1	300	118	C-1
5구간	오류동 9-65~14-143	150	67	A-2

□ 추진 내용

○ 사업계획 심사현황(본부)

- 2022년 장기사용 배급수관 정비계획 및 도면 심사결과

: 누수대응과-130(2022.01.04)호, 누수대응과-1352(2022.02.11.)

○ 계약 심사현황(본부 안전조사과)

- 관련공문 : 본부 안전조사과-2642(2022. 3. 18)호

- 계약심사 결과

구 분	심사의뢰 금액	심사결과 금액	증 ․ 감
도급비	293,050,000	290,000,000	감3,050,000

□ 발주현황

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는자

○ 발주금액(도급비) : 290,000,000원

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

(장기사용 배급수관(350mm이하)정비)

○ 긴급공고 입찰시행

- 사유 : 재정을 신속집행하여 경제활력을 제고하고 서민생활 안정화에 기여하기 위해 긴급입찰을 시행코자 함.

- 관련공문

※「2022년 상반기 지방재정 신속집행 적극 활용 지침」안내(계약관련)

(재무과-3953호, 2022.1.25)

※ 2022년 재정 신속집행 추진계획 안내 및 자료 제출 요청

(기획예산과-1928호, 2022.2.23)

□ 향후 추진계획

○ 공사 계약의뢰 : 2022. 3. 28

○ 공고,개찰 및 적격심사 : 2022. 4. 1. ~ 4. 14.

○ 낙찰자 결정 및 계약 : 2022. 4. 15. ~ 4. 21.

○ 공사 착공(예정) : 2022. 4. 25.

○ 공사 준공(예정) : 2022. 10. (공사기간:착공일로부터 150일)

붙임  1. 계약심사 결과서 각 1부

2. 설계내역서 및 설계도면 1부.

3. 공사설명서 1부.  끝.