투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)동해종합기술공사
(경유)
제목	「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」설계도서 검토회의에 따른 조치요청

1. 우리 본부에서 추진 중에 있는 「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」와 관련입니다.

2. 부계약자(정석으뜸기술㈜)로부터 시트파일 항타 관련 내역누락에 대한 설계변경 요청이 있어 관계자 회의(감독부서, 감리단, 시공사, 설계사)를 3차례 진행한 결과

3. 본 공사 내역서에는 파일 항타 관련 품이 누락된 것으로 확인된 바, 아래와 같이 요청하오니 조속히 설계도서를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 설계도서 검토회의(3차-'22.3.24.) 결과 : 파일 항타 내역 누락

- 세부내용 : 말뚝박기용 천공(∅500mm미만, 2022년 건설공사 표준품셈 공통부문 5-3-2 참조)은 장비조립 및 해체, 천공, 파일근입, 마무리 및 뒷정리 작업을 포함하며, 항타 및 모래채움 등이 누락되어 있음

○ 조치사항

- 누락된 내역에 대한 설계 및 소요예산 제출(본부 및 감리단)

- 제출기한 : '22.4.6(수)까지.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이승훈		터널건설과장	장종환		토목부장	03/28
하현석
협조자
시행	토목부-20368	(	2022.03.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	lsh94@seoul.go.kr	/	대시민공개