문서번호	하천관리과-20402
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천계획팀장	하천관리과장
최명우		김현	03/28
			代양해선
협 조

준공기한 연기 보고

(중랑천 생태환경 개선 및 준설방안 마련을 위한 하상분석용역(총차,2차))

2022. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

중랑천 생태환경 개선 및 준설방안 마련을 위한 하상분석용역(총차, 2차)

준 공 기 한  연 기 보 고

『중랑천 생태환경 개선 및 준설방안 마련을 위한 하상분석용역』에 대한 용역사의 총차 및 2차 준공기한 연장 요청에 따른 검토 내용을 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 중랑천 생태환경 개선 및 준설방안 마련을 위한 하상분석 용역

○ 용역기간 : ’20.06.26. ~ ’22.06.30(2차 : ’21.8.1 ~ ’22.3.30)

○ 용 역 사 : ㈜동일기술공사 외 3개사

○ 용 역 비 : 472,333천원(2차 : 184,640천원)

○ 과업내용 : 측량, 시추조사 저질시험, 하도유지관리계획 수립 등

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’20. 06. : 1차 과업 착수

○ ’20. 07. : 착수보고 및 자문회의 실시

***********************************

○ ’20. 08. ~ 09. : 시추조사 및 저질시험 위치선정 회의 실시

○ ’20. 11. : 실정보고(구두보고)

**********************************************

**************************************************

**************************************

○ ’21. 07. : 1차 과업 준공(준공금 : 250,000천원)

○ ’21. 08. : 2차 과업 착수

○ ’21. 09. : 측량조사(2차) 보완측량 및 공공측량성과심사 의뢰

○ ’22. 02. : 하상변동 실태조사 및 영향검토

Ⅲ		준공기한 연기

○ 총차 및 2차분 용역 준공기한 연기

구 분	과 업 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	’20.06.26 ~ ’22.06.30	’20.06.26 ~ ’22.09.30	용역비 변동없음
2 차	’21.08.01 ~ ’22.03.30	’21.08.01 ~ ’22.06.30

○ 준공기한 연기사유

***************************************************************************

○ 지체상금 : 미부과

Ⅴ		향 후 계 획

○ ’22. 04. : 하도유지관리계획 수립

○ ’22. 05. : 자문회의(2차) 실시

○ ’22. 06. : 2차 과업 준공

붙임 1. 준공기한 연기 요청 공문 1부.

2. 실정보고 1부. 끝.