문서번호	토목부-20391
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		代김광호	03/28
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 - 실정보고(창동철교 정밀안전점검) 검토 보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(창동철교 정밀안전점검) 검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사』창동철교 정밀안전점검 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 보행교 실정보고 검토보고(지하철 4호선 창동철교 구조물 절밀안전점검)-창동상계 제22-050호(‘22.03.15.)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

□ 규    모 : 보차도교신설 : 폭 32.0m, 연장 118.0m

□ 사업기간 :‘21.04.19.∼’24.04.18. (1차 ‘21.04.19.∼’22.05.16.)

□ 도 급 비 : ************************

□ 시공사/건설관리사업단 : ******************************

Ⅲ		실정보고 검토

◆ 철도보호지구 행위신고 승인조건 이행 - 창동철교 정밀안전점검 시행

⇒ 도시철도 구조물 안전점검계획서는 공사 전·중·후(3회 이상)

지하철 구조물 상태에 대한 정밀점검(안전진단 전문기관) 실시

○ 추진경위

날 짜	주 요 내 용	비 고
‘21. 06.	- 서울교통공사 철도보호지구내 행위신고서 제출	서울교통공사 토목사업소
‘21. 07.	- 서울교통공사 1차보완 및 요청자료 제출 · 교량 가설에 대한 전도등 안전성검토 부분 보완자료	서울교통공사 토목사업소
‘21. 08.	- 서울교통공사 외부전문위원 기술자문 시행 통보 · 시공부분, 토질부분, 구조부분 외부전문위원 자문시행	서울교통공사 토목사업소
‘21. 10.	- 외부전문위원 기술자문 조치결과 제출	도시기반시설본부
‘21. 10.	- 철도보호지구 협의 완료 · 토목사업소-21720(2021.10.14.) 조건(준수)사항 포함	서울교통공사 토목사업소
‘22. 02.	- 보행교 실 착공전 구조물 정밀안전점검 실시후 작업개시 통보	서울교통공사 토목사업소

○ 위치도 및 현황사진

시점부 전경	종점부 전경

○ 공사비 및 수량 증.감 내역

- ********************************

(단위 : 천원)

공 종 명	규 격	금 액			비 고
		당 초	변 경	증·(-)감
창동철교 정밀안전점검	공사 전·중·후(3회)	*	******	******
부 가 세		***	*****
총 공 사 비		***	******		제경비 제외 공종

○ 용역대가 적용

-  용역대가 협의(공사계약일반조건 제6절, 제7절)

· 협 의 일 : ‘22. 03. 15.(화)

· 참 석 자 : 발주처 공사관리관 이회진

시공사 현장대리인 신동훈

· 협의결과 : 설계가×낙찰률(86.005%)과 견적금액 중 최저가 적용

- 산출내역

(단위 : 천원)

규격	설계가 × 낙찰률	견적가			적용	비 고
		㈜아주 엔지니어링	㈜ 지오넷	㈜ 지오이엔지
정밀안전점검 공사 전·중·후(3회)	******	******	******	******	******	부가세 제외

※ 설계가는 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침” 정밀안전점검 용역대가 산출기준 적용

Ⅳ		조 치 계 획

○ 서울교통공사 철도보호지구 허가 조건 이행에 따른 공사 전·중·후(3회)

창동철교 정밀안전점검용역 시행에 필요한 용역대가 산출 등 건설사업

관리단의 실정보고 내용은 적정한 것으로 판단되며, 향후 설계변경에         반영 하고 창동철교 정밀안전점검용역 과업내용서를 교부하여 용역관리에          만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 건설사업관리단 실정보고 검토 보고서 1부.

2. 창동철교 공사 전·중·후 정밀안전점검용역 과업내용서 1부. 끝.