문서번호	수상안전과-20092
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		이원군	03/28
			이철희
협조
	주무관		김세윤

「서울507호(순찰선) 수리 용역」

추가수리를 위한 계약 변경 계획

2022. 3.

한강사업본부

(수상안전과)

「서울507호(순찰선) 수리 용역」

추가 수리를 위한 계약 변경 계획

서울507호의 재운항을 위한 점검 및 정비 중 프로펠러 샤프트 기어 파손이 발견되어 추가 수리를 실시하고자 함

□ 용역현황

ㅇ 용 역 명 : 서울507호(순찰선) 수리 용역

ㅇ 용역내용 : 엔진 점검 및 소모품, 선외기 드라이브 등 교체

ㅇ 계약금액 : 금9,931,000원(금구백구십삼만일천원)

ㅇ 계약업체 : 주식회사 보트맥스(대표 이강욱)

ㅇ 착 수 일 : 2022.3.22.

ㅇ 준공기한 : 2022.3.22. ~ 2022.4.15.(25일간)

□ 추진사유

ㅇ 선외기 드라이브 로워케이스 교체를 위해 분해, 정비 중 프로펠러    샤프트 기어 파손이 발견되어 교체 필요

선외기 드라이브 분해 작업	파손된 샤프트 기어

ㅇ 교체 예정이었던 해수펌프, 연료게이지는 정비 결과 이상 없음

ㅇ 수심기 파손이 발견되어 교체 필요

□ 추가내용

ㅇ 드라이브 bravo 3 lower unit a'ssy 교체

ㅇ 수심기(관통형 쏘나) 교체 설치

□ 추가소요예산

ㅇ 소요비용: 금3,096,520원

- 예산과목: 한강 관공선 등 운영 및 관리, 시설비(100-401-01)

구 분	소 요 예 산	산 출 내 역
계	3,096,500원
추가작업	10,582,000원	○ 드라이브 bravo 3 lower a'ssy 9,680,000원 ○ 관통형 쏘냐 902,000원
취소작업	-7,485,480원	○ bravo 3 lower unit, gasket 6,600,000원 ○ 해수펌프, 연료게이지 885,480원

□ 향후일정

ㅇ 2022.3.28. ~  추가 수리

ㅇ 2022.3.30. ~  시운전, 한강복귀

붙임  추가 견적서 1부.  끝.