문서번호	설비부-20352
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		설비설계과장
강신영		03/29
		장재순
협 조
	주무관		최환수

『동부간선도로확장 방음벽 설치구간 통신공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

2022. 3

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부		요청일		2022년 03월 일
공 사 명	동부간선도로확장 방음벽 설치구간 통신공사
공사개요	공사규모		-동부간선도로 꺽기형 방음벽으로 설치되는 3-1구간 통신설비 지장 물 이설 및 광케이블 포설,접속
	공사기간		2021. 09. 13. ~ 2022. 07. 12.
	감 리 사		동부엔지니어링(주)
	설 계 사		(주)동해종합기술공사
	시 공 사		(주)퓨젼아이앤씨
자문 안건명			설계변경 요청금액의 적정성				요청금액		*********
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 동부간선도로 확장공사 관련하여 『동부간선도로확장 방음벽 설치구간 통신공사』관련, 상계10단지 방음벽구간 통신공사 추가 및 서울시설공단 요청사항 등을 반영하여 배관,배선,통신시설물 설계변경 1) 상계11단지 방음벽구간 통신공사 설계물량 오류 및 현장물량 상이의 대한 설계변경 2) 상계10단지 방음벽구간 통신공사 추가요청으로 배관,배선,통신시설물 추가 설계변경 3) 기존 운용중인 관련시설물 임시 이설 등(원인자부담) 배관,배선 누락으로 인한 설계변경 4) 시설관리공단 요청으로 기존 설계반영된 광케이블 접속점 활용으로 광케이블,접속점 물량 증,감으로 인한 설계변경 5) 상계10단지,11단지 방음벽구간 토목공사 시점이 다르므로 광케이블 접속 이중작업으로 인한 설계변경 6) 기존설계에 일반접속품 적용, 운용중인 망절체작업이므로 절체접속 품셈적용으로 인한 설계변경 7) 시설관리공단 요청으로 동부간선도로 확장공사 차로조정구간 차로폐쇄로 인한 VDS(영상)김지기 철거로 인한 물량증가로 인한 설계변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 설계변경내역서 참조 (관련문서에 첨부)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 1. 동부간선도로확장 방음벽 설치구간 통신공사 1) 신설공사 – 배관,배선,부가자재 신규추가 및 감소 2) 철거공사 – 배관,배선,부가자재 신규추가 및 감소 3) 임시이설공사 – 배관,배선,부가자재 신규추가 4) 고재처리비 신규추가(금액감소) 5) VDS(영상)검지기 철거공사 - 신규추가 ▪ 물량 증감내역 (내역서 참조)					▪ 공사비 증감내역 ************************** ************************** ************************* ▪ 설계변경 주요 공종 -동부간선도로확장 방음벽설치구간 통신공사 (신설공사,철거공사,임시이설공사,고재처리비, VDS[영상]검지기 철거공사)
별첨서류	설계변경 심의요청 자료 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	동부간선도로확장 방음벽 설치구간 통신공사
계약금액	*************	계약일	2021.09.03.	시공사	(주)퓨젼아이앤씨
공사기간	2021.09.13. ~ 2022.07.12.	낙찰률	87.749%	설계자	(주)동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사( )			감리자	동부엔지니어링(주)
공사규모	-동부간선도로 꺽기형 방음벽으로 설치되는 3-1구간 통신설비 지장물 이설 및 광케이블 포설,접속			※ 담당자 : 공사관리관 강신영 02) 3708-8650

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증 · 감(직접비)
변 경 개 요	****** ****** ************** ******* *********************** *********		*********** *********** ***************** ************ ************************** **************	***************** ***************** ***************** ***************** ******************* *****************
공 사 비	**********************		**********************	**************
적 용 요 율	기계약- 87.749% (낙찰율)		87.749% (낙찰율) 적용
설계변경요구자	□ 발주처 □☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방계약법 시행령 제74조 4항
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 : 도시기반시설본부-22-2337(22.3.2)
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 1.가
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	-설계도서 검토결과, 설계 오류수정 및 내역누락, 토목구조물에 시공되는 통신설비의 시공 방법을 현장여건에 맞게 변경적용,유관기간 협의사항, 발주처 지시사항을 반영을 위하여 설계도서 및 설치자재의 규격변경, 내역서 수정, 시공방법 변경 등 설계변경을 실시함.
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	■ 이행 □ 미이행