문서번호	정수시설과-20156
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중	전훈	03/29
		代유준수
협 조
	주무관		박희정

『2021년도 일반전기설비 유지보수공사』

설계변경 (총차 및 2차) 계획

2022. 3.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

『2021년도 일반전기설비 유지보수공사』

설계변경 (총차 및 2차) 계획

장기계속 전기설비 연간단가 공사의 작업지시 시공물량 반영 및 보험료 정산 등 설계변경 보고드림

Ⅰ		공사개요

****************************************

**************************************************

***************************************************************

*********************************

Ⅱ		설계변경 사유

❍ 작업지시에 의한 계약물량 조정, 신규 공종 물량 반영

❍ 고용개선지원비 및 제경비 정산

Ⅲ		관련근거

❍ 지자체 입찰 및 계약집행 기준(제13장 공사계약일반조건, 제6절 공사설계의 변경)

❍ 2021년 일반전기설비 유지보수공사 작업지시(2차_1회)

Ⅳ		추진일정

❍ 공사비 변경 현황(※상세변경내용은「설계변경내역서」 참조)

구 분	계 약 금 액(원)				증·감(원)
	당 초		변 경
총공사비					감)1,783,480
	182,396,770		180,613,290
	1차(2021년)	2차(2022년)	1차(2021년)	2차(2022년)
재 료 비	16,231,773	8,260,429	16,231,773	4,810,097	감)3,450,332
노 무 비	78,163,144	20,555,946	78,163,144	23,484,579	증)2,928,633
경 비	9,886,957	4,974,907	9,886,957	3,758,497	감)1,216,411
기 타	32,848,416	11,475,198	32,848,416	11,429,827	감) 45,371
합 계	137,130,290	45,266,480	137,130,290	43,483,000	감)1,783,480

❍ 정산대상 보험료 등 2차분 정산내용(※계약업체 실적 제출에 의함)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증·감(원)
기계경비	-	1,044,165	증) 1,044,165
산재보험료	760,569	868,928	증) 108,359
고용보험료	178,835	204,314	증) 25,479
기타경비	1,671,348	1,641,090	감) 30,258
안전관리비	577,932	-	감) 577,932
건강보험료	735,934	-	감) 735,934
노인장기요양보험료	84,778	-	감) 84,778
연금보험료	965,512	-	감) 965,512
고용개선지원비	1,200,208	-	감) 1,216,411
합 계	6,175,116	3,758,497	감) 2,416,619

Ⅳ		조치계획

❍ 계약상대자의 보험료 등 납부실적 금액을 반영하여 설계변경 시행

❍ 1차 계약내역 미반영 물량은 2차 계약내역에 반영하여 정산

붙 임: 1. 작업지시물량 내역서 1부.

2. 설계내역서 총차 1부.

3. 설계변경내역서 2차 1부.  끝.