문서번호	도시철도설비부-20327
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
이학수		전계목	03/30
			김중영
협조

『별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사』

설계변경(총차2회 및 1차1회) 검토 보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사』

설계변경(총차2회 및 1차1회) 검토 보고

우리 본부에서 시행하고 있는 『별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사』와 관련하여 설계변경(총차2회 및 1차1회)을 검토하여 보고함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1-2구간 송변전공사

□ 계 약 자 : (주)광덕전력 외 2개사

□ 계약사항

구분	공사금액	공사기간	비고
총차	**************	*************************
1차	************	*************************	금회
잔여	**************	*************************

□ 감리단 : **************

Ⅱ		관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

□ 실정보고 및 승인

○ 2022.03.28. *********************

Ⅲ		설계변경 주요내용

□ 설계변경 내용

○ 계약금액                                         (단위 : 원)

구분	당초금액	변경금액	증감액	공사기간	비고
총차	*************	*************	*************	************** ****************
1차	***********	***********	*	************** ****************	*** ****

○ 항목별 물량 및 공사비 증감내역(총차)             (단위 : 원)

공종	단위	당초		변경		증감
		수량	금액	수량	금액
파상형경질폴리에틸렌전선과	M	*****	**********	*****	**********	*************
관로방수구	개소	**	*********	**	*********	*************
관로구 이음관 (아답타)	개소	**	*********	**	*********	*************
PE보호판	장	***	*********	***	*********	*************
경고테이프	M	*****	*******	***	*******	*************
소 계			**********		**********	*************

○ 공사비 증감내역

- 총차 2회                                              (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
재 료 비	*************	*************	***************
노 무 비	*************	*************	*****************
경 비	***********	***********	****************
일반관리비	***********	***********	*****************
이 윤	***********	***********	***************
미확정설계공정(PS)	***********	***********	*
도급공사비	*************	*************	*****************

- 1차 1회(차수간 내역조정)                              (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
재 료 비	**********	**********	**************
노 무 비	**********	**********	**************
경 비	**********	**********	****************
일반관리비	*********	*********	*****************
이 윤	*********	**********	***************
미확정설계공정(PS)	**********	**********	**************
도급공사비	***********	***********

Ⅳ		검토의견

□ 감리단 검토의견

○ ******************************************************************************************************************

□ 보고자 검토의견

○ ************************************************************

□ 조치방안

○ 총차2회 및 1차1회 설계변경 시행

Ⅴ		행정사항

□ 설계변경 시행 및 계약의뢰(도시철도설비부 → 총무부)

붙임  1. 계약변경 요청서 및 합의각서 각 1부. 끝.