문서번호	기전과-20441
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이희수		이지영	03/30
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토

과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 원인자부담공사 준공일 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사(신호)

○ 공사위치 : 강남구 테헤란로 7길 22

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 3. 31.

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공
신 호	******** ****	*******	*******	*********

○ 원인자 및 업체현황

검토내용

○ 규제심의 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-3265호(2022. 2. 15.)

○ 변경사항 : 토목공정 지연에 따른 공사기간 연장 요청

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
신 호	******** ****	*************	*************

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여야 하며, 변경사항 (교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 공사구간내 가공케이블은 지중화를 원칙으로 설계, 부득이한 경우 사유서 또는 실정보고서 첨부하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 및 지주내 가로등  안정기실과 신호점검구는 별도 분리 설치

- 지주는 수직으로 건주하여야 하며, 바닥면에서 2m까지 광고물 부착 방지 시트 설치 색상은 기와진회색(NCS S 7502-Y)으로 시공하여야 함

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 음향신호기의 경우 IoT기능이 있는 것으로 설치

- 한국전기설비규정(2022. 1. 1. 개정)에 부합하는 전선식별 색상의 케이블 사용

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 설치

- 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치․관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

************에서 시행하는 과학기술인 복지콤플렉스 주변 교통안전시설물 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면(별첨) 1부.

4. 준공일 변경승인 요청 공문 및 감리사 서류 1부.  끝.