문서번호	공원녹지정책과-20490
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	공원협력팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
조현	박정옥	이승복		03/30
				유영봉
협 조
	공원녹지정책팀장		손형권

공원내 실내놀이터 사업성 제고를 위한

실내 놀이환경 조성 컨설팅 운영계획

2022. 3.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

공원내 실내놀이터 사업성 제고를 위한

실내 놀이환경 조성 컨설팅 운영계획

"공원내 실내놀이터 조성"과 관련, 어린이 등 이용자의 만족도 및 사업성 제고를 위해 관련분야 전문가를 활용한 실내 놀이환경 조성 컨설팅 운영

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

○ 대    상 : 성북구 벌집어린이공원 등 6개소

○ 사업기간 : 2021. 11. ~ 2023. 10.

○ 사 업 비 : 8,220백만원('21년 특별교부금, 명시이월)

○ 사업내용 : 공원내 건축을 통한 실내놀이터 조성

※ 사전절차(건축기획, 공공건축심의, 도시공원위원회 심의 등) 이행 포함

□ 추진현황  : 4개소 설계중 / 2개소 사업지연

(단위 : ㎡, 백만원)

연번	자치구	공원명	규 모	사업비	추진사항	세 부 내 용
계	6개소		2,060	8,220	(설계중)4개소 / (사업지연)2개소
1	성북구	벌 집	160	762	설계중	▶ 건축기획(1.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(3.~5.) ▶ 공사시행(6.~11.)
2	노원구	중 평	500	1,924	설계중	▶ 건축기획(2.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(4.~8.) ▶ 공사시행(9.~12.)
3	양천구	강 월	200	902	설계중	▶ 건축기획(2.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(3.~6.) ▶ 공사시행(7.~11.)
4		오목근린	380	1,396	설계중	▶ 건축기획(3.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(1.~4.) ▶ 공사시행(5.~11.)
5	서초구	양재근린	200	902	사업지연 (대상지변경 검토)	▶ 건축기획 및 대상지변경(3.~5.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(6.~10.) ▶ 공사시행(11.~'23.6.)
6	송파구	천 상	620	2,334	사업지연 (주민의견 수렴)	▶ 주민설문(2.~3.) ▶ 사업계획 확정(4.~5.) ▶ 사전절차 이행(6.~9.) ▶ 설계, 도시공원위원회 심의(10.~'23.3.) ▶ 공사시행('23.4.~10.)

Ⅱ		현실태 및 문제점

□ 공원 내 건축의 공공성, 경관성에 집중된 심의

○ 공공건축의 공공성 확보를 위한 사전절차 이행

- 사전절차 : 건축기획, 건축계획 사전자문, 공공건축심의 등

○ 자연환경과의 조화 등 경관성 제고를 위한 도시공원위원회 심의

- 공원녹지법에 따른 건폐율 및 공원시설의 적법성, 건축계획의 적합성 등

□ 실내 놀이터 세부 조성안에 대한 검토기능 미비

○ 실내공간 조성을 일반 인테리어 개념으로 접근할 경우 아동의 놀이활동, 발육에 도움이 되는 놀이환경 조성에 한계(이용자 만족도 저하)

○ 건물 신축과 실내 놀이시설 디자인 및 설치부서가 자치구마다 상이해 이를 총괄하는 공원조성계획(변경)안 수립의 어려움

➡ 사업성 제고를 위해 실내 놀이환경 조성안에 대한 전문분야 자문 필요

Ⅲ		추 진 계 획

□ 실내 놀이환경 조성 컨설팅 운영

○ 대    상 : 공원 내 실내놀이터 조성지

○ 구    분 : 디자인 자문 / 현장 멘토링

구 분	세 부 내 용
디자인 자문	① 공원조성계획에 실내놀이터 세부 조성안 포함 : 도공위 심의 전 시행 ② 공원조성계획에 실내놀이터 세부 조성안 미포함 : 도공위 심의 후 시행
현장 멘토링	"실내놀이터 조성 디자인 → 놀이시설 설치 → 안전성 검사 등" 사업 단계에 따른 분야별 전문가의 현장 자문 시행

○ 운영방법 : 사업기관 요청에 의거, 디자인 자문 및 현장 멘토링 병행

○ 컨설팅 내용

- 시설별 실내 놀이환경 조성 컨셉 및 어린이 의견을 반영한 디자인 요소

- '서울형 키즈카페' 조성 및 운영에 관한 가이드라인 준수여부

- 도입 놀이시설의 적합성 및 안전성 등

□ 전문가 현황

○ 분    야 : 어린이교육, 놀이활동, 놀이시설 설치, 안전 등

○ 구    성 : 8명

분 야	성 명	소 속	직 위
*** ****	***	************	***
	***	************	***
****	***	***********	***
	***	*******	***
	***	**********	***
**** ****	***	**********	***
	***	******	****
****	***	**************	***

※ 서울시 어린이놀이환경 조성위원회 및 서울형 키즈카페 컨설턴트 인력풀 활용

□ 소요예산

○ 전문가 컨설팅 참석수당 지급 : 3,600천원

- 4명(분야별 1명) × 6개소 × 150,000원 = 3,600천원

○ 예산과목 : 공원녹지정책과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비

Ⅵ		향후계획 및 협조사항

□ 향후계획

○ 실내 놀이환경 조성 컨설팅 운영계획 안내(시 → 사업기관) : '22. 3.

○ 실내 놀이환경 조성 디자인 자문 및 현장 컨설팅      : '22. 4. ~

□ 협조사항

○ 서울형 키즈카페 컨설턴트 인력풀 활용             : 가족담당관

붙임 : 공원 내 실내놀이터 조성 세부현황 1부.  끝.