의원 요구 자료 제출

시 행	수상기획과-20133	(	2022.03.30	)
접 수		(		)
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자 참조
수신자	서 울 특 별 시 장 (기획담당관), 기획예산과장

주무관	수상기획과장	운영부장	한강사업본부장		결재
이정원	박인수	이철희	03/30
			윤종장
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출( 요구번호304번, 이명수의원 , 행정안전위원회)

이명수 국회의원(행정안전위원회, 국민의힘, 충남 아산시갑)님이 요구하신 자료를 아래와     같이 제출합니다.

따로붙임 :      이명수 국회의원 요구자료 1부.  끝.

				이명수 국회의원 (행정안전위원회, 국민의힘)
□ 요구번호 :	304		번
□ 요구내용
1. 난지 한강공원의 수상레포츠 통합센터 관련 1-1. 취지 및 목적, 센터개요 1-2. 진행사항 1-3. 직접운영/위탁운영 여부를 포함한 수상레포츠통합센터 운용계획안 1-4. 향후 추진계획

□ 취지 및 목적

○ 최근 수상이용 트랜드는 기존 수상 영업시설 이용보다는 개인 레저선박을  이용한  수상레저활동이 꾸준한 증가 추세로 기반시설인 교육·훈련장과 공용계류장 등의 부족으로 인한 시민활동 불편해소와 수상레저인구 저변을 확대하는 등 한강 수상이용 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’15. 7. ~ ’22. 12.  ('22. 3월 공정율 : 52%)

○ 사업위치 : 서울시 마포구 한강난지로 162(난지한강공원 내 수변)

○ 총사업비 : 15,729백만원

○ 사업내용

구 분	규 모	주요 기능	시설 배치
통합지원 센 터	1층 611.4㎡	교육 및 편의시설	교육장,탈의 및 샤워장,화장실
	2층 615.5㎡	휴게공간	커뮤니티룸(휴게공간) 등
수상계류장	A=523㎡ 69척	계류 및 훈련	중소형 요트,보트,카누 등
육상계류장	A=5000㎡150척	선박 보관	요트,보트, 카누 등 계류

○ 시공업체 : (주)삼천리ENG, (주)지우토건

○ 감리업체 : (주)동해종합기술공사, 케이알이 엔지니어링

□ 진행사항

○ '15. 07.03.	2016년 신규사업 선정, 市투자심사(조건부 추진)
○ '17. 04.06.	수상레포츠 통합센터 설계용역 시행계획(설계공모)
○ '18. 03. 22.	市 투자심사 재상정(결과 : 조건부 추진)
○ '20. 11. 18.	공사 계약 및 착공(장기계속계약)
○ '21. 04. 07.	1차 시설공사 준공 (선박)
- 선박블럭(부유체)제작 (길이50m×폭29m×깊이3m, 520톤)
○ '21. 05. 17.	2차 시설공사 착공 (선박, 항만토목, 건축 등)
- 방파제(90m×3.9m), 강관파일(D711㎜)70본, 강관파일(D1200㎜)5본
○ '22. 04. 30.	2차 시설공사 준공 예정

□ 직접운영/위탁운영 여부를 포함한 수상레포츠 통합센터 운용계획안

○ 사용수익허가·민간위탁·직접운영 등 모든 운용방안에 대해 이용시민, 전문가 자문 등의 다양한 의견을 수렴하여 구체적인 운영 방식을 수립할 예정임

□ 향후 추진계획

○ '22. 3월	3차 시설공사 발주 및 착공(건축, 토목, 기계 등)
○ '22. 4월	전기·통신·소방 등 공사 발주 및 착공
○ '22. 6~7월	수상레포츠 통합센터 운영방안 위원회 구성
○ '22. 10월	3차 시설공사 준공 예정
○ '22. 12월	전기·통신·소방 등 공사 준공
○ '22. 12월	수상레포츠 통합센터 운영방안 최종 결정
○ '23. 1~2월	수상레포츠 통합센터 개장 예정

□ 조감도

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	한강사업본부 (수상기획과)	담당사무관	박인수
	☎3780-0821	담당자	이정원
	작 성 일 : 2022. 3.