문서번호	건축부-20481
결재일자	2022. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
박지영		차무흥	03/30
			代차무흥
협조
	주무관		김예림

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

실정보고 검토결과 보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(건축부)

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

실정보고 검토결과 보고

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재(담장, 북신문) 복원공사와 관련, 실정보고 검토결과 보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사

위    치 : 종로구 창덕궁 교차로 ~ 원남동사거리

공사기간 : 2010. 10. ~ 2022. 06.

(건축)규모 및 내용: 궁궐담장 490m, 북신문1개소 등

총사업비 : 992억원(건축: 47.5억원)

감 리 자 : ㈜케이씨아이, ㈜천일

시 공 자 : ㈜건도, 북일종합건설㈜, 이에스개발㈜

현 공정 : 궁궐담장 490m중 400여m 시공 완료

- 공사장 주출입구 부분(49m) 지대석 및 사고석 쌓기

- 승강기 설치 부분(37m) 담장 기초공사 추진 중

Ⅱ		실정보고 내용

관련근거

○ 율곡감 제2022-118호(2022.3.18.) 율곡로 도로구조 개선공사(건축공사) 실정보고

○ 건도율곡 제*******05호(2022.3.18.) 실정보고 승인 요청

****************************************

실정보고 내용 검토

*************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		감리자 검토의견

문화재청의 현상변경 허가사항과 기존담장의 폭, 쌓기방식에 따라 담장의 폭과 사고석의 규격이 변경되어 설계변경이 불가피함.

설계변경 방법은 공사계약일반조건 제20조에 따라 시행하고, 담장의 설계는 1식 단가로 계약되어 있어 규격이 변경되는 부분과 물량이 증가되는 부분은 신규항목으로 하여 협의율 적용.

기존물량에 대하여는 E/S를 적용하여 산정하였으며 위와 같이 설계변경하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅵ		처리의견

감리자의 실정보고 검토의견과 같이 실정보고 승인

관련 법령 및 계약변경 절차에 따라 계약금액 조정시 공사물량 및 단가, 금액 등을 확정하여 계약변경 진행(토목부 주관)

붙임 : 율곡로 도로구조 개선공사(건축공사) 실정보고 1부. 끝.