문서번호	설비부-3764
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
유영선		오삼록	03/23 代여인웅
협조

『청계천로 자전거전용도로 구축공사』

교통신호기공사 준공기한 연장 검토 보고

2021. 3.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『청계천로 자전거전용도로 구축공사』

교통신호기공사 준공기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기공사』와 관련 건설사업관리단으로부터 제출된 준공기한 변경사항에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 청계천로 자전거전용도로 구축 전기공사

○ 위    치 : 청계천로 청계광장~ 고산자교 간

○ 규    모 : 신호지주 26본, 신호등 36조 교체 및 이설

○ 공사기간 : 2020.10.14. ~ 2021.03.31.

**********************

*************************

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링

Ⅱ		관련근거

○ 수성엔지니어링 청계천 제2021-17호(2021.03.22)

→ 교통신호기공사 계약기간 변경요청 검토보고

Ⅲ		검토내용

○ 계약기간 변경

- 당초 : 2020.10.14. ~ 2021.03.31.

- 변경 : 2020.10.14. ~ 2021.06.30.(91일 연장)

○ 준공기한 연기사유

- 선행 공종인 토목공사 준공기한이 2021년 3월 31일에서 2021년 6월 30일로  변경(91일 연장)됨에 따라 후속공종인 교통신호기공사 준공기한 연장

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정인 토목공사의 공정계획 변경으로 준공기한내 준공처리가 어려워 후속공정인 교통신호기공사 준공기한을 연기함이 적정.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 준공기한 연기보고가 타당한 것으로 판단되어 교통신호기공사 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 하며 계약부서(총무부)에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.