“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(암사2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사)

1. 정수시설과-20174(2022.3.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 시행중인 『암사2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 암사2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사

나. 공사기간 : 2021. 9. 1. ~ 2022. 3. 31.

다. 계약금액 : ************

라. 계 약 자 : ****************

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

바. 설계변경 사유 : 물량 증•감 및 고재처리 정산

사. 설계변경 내역

구 분	금 액(원)
	당 초	변 경	증•감
총공사비	***********	***********	***********
공급가액	***********	***********	***********
부 가 세	**********	**********	*********

아. 사고이월액 추산

(단위 : 원)

계약금액(당초)	사고이월액	감액(정산)	비 고
917,326,650	543,046,650	1,316,650	감추산필: 2022.03.30.

【추산필 : #884,2022.01.12.】

붙임  1. 설계변경(정산) 보고서 등 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

안전관리팀장	오광준		주무관	전승민A		정수시설과장	전훈		암사아리수정수센터소장	03/30
代유준수
협조자	주무관	변민용
시행	정수시설과-20191	(	2022.03.30	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5775	/전송	02-3146-5707	/	okwjun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)