문서번호	시설관리과-20717
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
차승환		이승영	03/31
			조임남
협조

현장 실정 보고서 접수에 따른 검토 보고

(노량진 배수지)

2022. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장 실정 보고서 접수에 따른 검토 보고

「노량진배수지(1) 내부방식공사」의 감리업체인 서울시설공단에서 공사

실정 검토 보고서가 제출되어 검토후 결과를 보고 드림.

□ 현   황

○ 공 사 명: 노량진배수지(1지) 내부방식공사

○ 공사기간: 2021. 6. 11. ~ 2022. 4. 15.

○ 도 급 비: 485,304,800원

○ 공사개요: 내부 그라인딩 9,245㎡, 단면보수 835㎡

(관급 : 패널식 3,865㎡, 도막식 6,222㎡)

○ 도 급 자: 고양종합건설㈜ 대표 이홍준

○ 감    독: 서울시설공단 공사감독2처 박영환

○ 관련공문

-「공사실정보고서 제출(노량진배수지 내부방식공사)」 공사감독2처-2116(2022. 3.29)

□ 실정보고내용

○ 관급시공 (패널식) 수량정산

가. 보고내용

- 본공사의 패널식(관급시공) 설계 수량에는 배수지 벽체상부 헌치 부분이

포함되어 있으나 헌치부분은 도막시공 이며, 패널식 수량에서 제외 되어야 함.

나. 검토의견

- 관급시공 (패널식) 수량, 금액정산

구 분	수 량 (㎡)	금 액 (원)	증ㆍ감(원)	비 고
당 초	3,865	687,970,000	감) 17,622,000	할인전 금액
변 경	3,766	670,348,000

□ 조치의견

○ 상기 서울시설공단의 공사 실정검토 보고에 따른 승인요청에 대하여 적정하다고 판단되며,

○ 공사감독에 만전을 기하도록 서울시설공단에 회신코자 하며

○ 패널 절감분에 대하여는 조달청에 수량변경신청하여 처리코자 함.

붙임 :  실정보고서 1부.  끝.