코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서울 빛의 관문 야간경관 특화계획 수립용역 2차)

1. 도시빛정책과-20303('22.3.30.)호 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인「서울 빛의 관문 야간경관 특화계획 수립용역(2차」의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 용  역  명 : 서울 빛의 관문 야간경관 특화계획 수립용역(2차)

□ 계약상대자 : (주)휴엘디자인(대표사), (주)엔토스

□ 계약 변경내용

○ 준공기한 연기 : '22.4.26.(당초) → '22.8.12.(변경) ※ 계약금액 변경없음

구분	당초	변경
계약기간	’22.3.15. ~ ’22.4.26.	’22.3.15. ~ ’22.8.12.

○ 귀책사유 : 계약상대자 귀책사유 없음

○ 지체상금 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연장 검토보고, 준공기한 연기의뢰서, 용역사 합의각서 각 1부.

2. 과업내용서, 예정공정표 각 1부.  끝.

	도시빛정책과장
주무관	이원준		도시빛정책팀장	김재웅		도시빛정책과장	03/30
김대권
협조자
시행	도시빛정책과-20333	(	2022.03.30	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, (서소문동 씨티스퀘어빌딩 11층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1923	/전송	02-2133-1444	/	wonjun76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)