문서번호	지식문화과-20364
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	지식문화과장	서울도서관장
고가연	차영선	03/31
		오지은

『서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링 공사』

건축/기계 2차계약시행 검토보고

2022.3

서울도서관

[ 지식문화과 ]

『서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링 공사』

건축/기계 2차계약시행 검토 보고

「서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링 공사」와 관련하여 건축/기계(2차) 계약시행에 대하여 검토 보고 드림.

※1차 준공(2022.3.31.)에 따른 2차 계약시행

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사(건축,기계)

□ 위    치: 구로구 경인로 430(고척스카이돔)

□ 규    모: 지하2층/지상4층, 연면적 83,623.43㎡중 지하1층 2,656.49㎡

□ 공사기간: 2021.12.13.~2022.04.30.(총차)

2022.04.01.~2022.04.30.(2차)

□ 계약금액: 451,196,800원(2차수) (총차 계약금액:1,059,098,800원)

□ 시 공 사: 하우텍씨엔알건설(주)

□ 감 리 자: ㈜한마루건축사사무소

Ⅱ		추진경위

□ 2020.09. : 서울아트책보고(제2책보고) 조성 기본계획 수립

□ 2020.11. : 기본구상 및 기본설계용역

□ 2021.06. : 실시설계용역(2021.08 설계용역준공)

□ 2021.12.13. : 공사착공(건축,기계)

□ 2022.02.28. : 1차수 공사기간 연장요청(하우텍씨엔알건설(주))

□ 2022.03.31. : 1차수 공사준공 및 2차수 계약요청

□ 2022.03.현재. : 칠공사 및 천정공사 진행(공정률 : 약58%)

Ⅲ		관련근거

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제11장입찰유의서 제3절제1조마항

- 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링 공사(건축,기계) 2차 계약 요청건(하우텍(아트책보고) 제22-08호)

Ⅳ		계약현황

구 분	기 간	금 액(원)	비 고
총차	’21.12.14.~’22.04.30.	1,059,098,800	-
1차	’21.12.14.~’22.03.31.	607,902,000	준공예정
2차	’22.04.01.~’22.04.30.	451,196,800	금회계약분

Ⅴ		처리의견

□ 건축/기계 분야 1차 공사기간 종료에 따라 2차계약을 시행코자 함(공사계약 체결 후 2차수 착수계 제출예정)

□ 2022년 제2책보고 조성 본예산 시설비로 시행

- 예산과목: 도서관 및 독서문화진흥, (균형발전특별회계)도서관건립조성, 제2책보고조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  건축/기계 2차공사 계약요청서 1부.  끝.