문서번호	도시빛정책과-20410
결재일자	2022. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장
차재현	김재웅	04/01
		김대권

「4대 지천 야간경관 종합계획 수립용역(2차)」 준공기한 연장 검토 보고

2022. 4.

도시계획국

(도시빛정책과)

「4대 지천 야간경관 종합계획 수립용역(2차)」

준공기한 연장 검토 보고

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 4대지천 야간경관 종합계획 수립(2차)(장기계속계약)

ㅇ 용역업체 : ㈜이온에스엘디 + ㈜유로컨설팅(공동이행)

ㅇ 용역기간 : ’22.3.10. ~ 7.16.  ※ 1차 용역 ’21.5.17.~12.10.

ㅇ 용 역 비 : 135,433,200원(총차 234,717천원, 1차 99,283천원)

□ 준공기한 연기

ㅇ 연기내용 : ’22.7.16.(당초) → ’22.10.13.(변경) ※계약금액 변경없음

구분	당초	변경
계약기간	’22.3.10. ~ ’22.7.16.	’22.3.10. ~ ’22.10.13.

ㅇ 연기 사유

- 코로나19 감염 확산에 따른 현장답사 및 관계기관 업무협의시 대면접촉 등 용역수행자의 안전을 고려, 용역(2차) 착수일을 ’22.3.10.로 연기

- 용역(2차) 계약기간이 129일로, 당초 절대공기인 218일을 미충족하므로 절대공기 확보를 위해 용역기간 연장 필요

※ 현재, 용역(1차) 준공 이후 미계약기간(’21.12.11. ~ ’22.3.9.) 미반영됨

ㅇ 귀책사유 : 계약상대자 귀책사유 없음

ㅇ 지체상금 : 미부과

□ 행정사항

ㅇ 계약기간 연장 의뢰(재무과)

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 용역사 합의각서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 예정공정표 1부.  끝.