문서번호	방재시설부-20554
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
이재미		代박용도	전결 04/04
			이동훈
협조

「제2자유로 종점부 입체화공사」

조경분야 실정보고 검토결과 보고

도시기반시설본부

(방재시설부)

「제2자유로 종점부 입체화공사」

조경분야 실정보고 검토결과 보고

토목공사 선형변경에 따라 공사 굴착범위내 저촉수목 정비가 필요하다는 실정보고에 대해 검토한 결과, 타당하여 승인하고자 함

□ 보고개요

○ 보 고 자 : 책임건설사업관리기술자 정원영

○ 보고과정(시공사 → 건설사업관리단 → 본부)

□ 시공사) 실정보고 제출[삼부자유 22-135호(2022.3.24.)]

□ 관리단) 조경공사 실정보고[제2자유입건 제22-106호(2022.3.31.)]

○ 보고요지

□ 토목공사의 선형변경으로 저촉수목 정비 사항 발생 및 처리계획(안) 보고

· 위치 : 월드컵로 중앙분리대 및 난지천공원 일부,

· 물량 : (교목) 산사나무외 4종 68주, (관목) 회양목외 5종 384주

□ 저촉수목 정비에 따른 공사비 증감사항 보고

※ 제2자유로 종점부 입체화공사 개요

- 위    치 : 마포구 월드컵경기장 교차로 일대

- 공사기간 : 2019. 8. 1. ~ 2022. 9. 30.

- 총사업비 : 531억원(조경 637백만원)

- 시공사및감리사 : 삼부토건(주)외 2 / 동부엔지니어링(주)외 2

□ 보고내용

○ 저촉수목 물량 및 처리계획(안)

구 분	규격	단위	수량	처리계획(안)	순공사비 증감
생육양호 교목 (산사나무 외 2종)	`R10~R32	주	24	***************	증 8,040,055원
생육불량·대형 교목 (잣나무 외 2종)	R17~R62	주	44	***********	중 7,810,264원
교목(계)		주	68

구 분	규격	단위	수량	처리계획	순공사비 증감
생육불량 관목 (회양목 외 3종)	H0.3~H1.1	주	384	***********	증 150,907원
임목폐기물 운반처리 (제경비제외 공종)		ton	24		증 1,453,924원

○ 조경분야 공사비 변경사항 : 증 27,228천원

□ 적용단가 : 계약단가 적용(기존비목)

□ 공사비(조경) 변경사항

(단위:천원)

구 분	변경 전	변 경 후	증·감
도급비(조경)	637,166	664,394	증 27,228

□ 검토결과

○ 토목공사 선형변경에 따라 굴착범위에 포함되므로 수목정비가 불가피하며 저촉수목 처리계획이 적정함

□ 월드컵교차로 선형변경에 따라 난지천공원측 2개차로 설치 및 월드컵로 중앙분리대 이설로 인하여 수목이 저촉됨

□ 관리청인 마포구청, 서부녹지사업소의 저촉수목 처리의견이 반영되었고 대상 수목의 생육상태 및 규격에 따라 조경수로서의 가치와 이식활착율 등을 고려한 처리계획으로 적정함

○ 단가적용 적정

□ 기존비목으로 계약단가 적용

○ 승인 시 사업비 범위내에서 설계변경 가능

□ 공사총괄부서(토목부) 확인 결과 예산(증 27,228천원) 사용 가능함

○ 금회 저촉수목 정비 후 해당구간 조경복구 필요

□ 월드컵로 중앙분리대, 난지천공원 녹지에 대한 조경복구계획을 별도로 수립하여 공사 필요

□ 처리의견

○ 본 실정보고 사항이 타당하다고 판단되는 바, 승인처리하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

□ **************************************************************

○ 조경복구계획(안)에 대해서는 책임건설사업관리기술인에게 조경복구공사 전에 별도로 수립하여 추가 실정보고토록 하고자 함.

붙임  실정보고서(제2자유입건 제2022-106호) 1부.  끝.