문서번호	시설보수과-20463
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
김전수	代이이용	안준수	04/04
			김영철
협 조
	기전과장		최경주
	주무관		최진일

-『시설물 유지관리에 관한 서울시-고양시간 협약사항』관련 -
봉산터널 유지관리 인수·인계 보고

2022. 4.

서부도로사업소

(시설보수과)

-『시설물 유지관리에 관한 서울시-고양시간 협약사항』관련 -

봉산터널 유지관리 인수·인계 보고

도시기반시설본부에서 시행한 「신사사거리~고양시계간 도로개설공사」(2016.9.26.) 후 우리사업소로 인계되어 관리해 온 ‘봉산터널’을 협약사항(2011.10.19.)」에 의거 고양시로 이관하고자 함.

	Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-20045(‘16.9.30.), 봉산터널 시설물 인수·인계

○ 시설물 유지관리에 관한 서울시-고양시 협약사항(2011.10.19.)

▶ 협약서 제4조(업무분담) 제②항 제1호에 의거 터널 준공 후 서울시에서 5년간 유지관리 후 고양시로 인계(2021.9.27.일자)

	Ⅱ		추 진 경 위

인수·인계 추진경위

○ 2012.12.~2016.9.: 도로개설공사 시행(봉산터널)-도시기반시설본부

○ 2016.2.19.: 준공전 시설물 합동점검(1차)

- 외부전문가(2인) 합동점검 실시하여 공동두 배수구 덮개 정밀시공 및 측면 표면처리 불량, 갱구부 사면 보완 등 지적사항 통보

○ 2016.3.~9.: 합동점검 지적사항 보완(도시기반시설본부)

○ 2016.9.6.: 인수인계 전 시설물 합동점검(2차)

○ 2016.9.23.: 서부도로사업소장 합동점검(3차)

- 라이닝 누수흔적 및 고양시측 갱구사면 우선 정비 요청

○ 2016.9.30.: 공사준공(9.26.) 및 터널 인수인계 시행(도기본)

- 2, 3차 합동점검 지적사항은 시공사에서 추가 보완 시행

○ 2016.10.28.: 2,3차 합동점검 지적사항 보완 완료

○ 2016.11.16.: 준공도서 등 관계서류 이관

○ 2017.01.11.: 터널 계측 관리시스템 이고나 설치(도기본→사업소)

○ 2017.01.12.: 시설물정보관리종합시스템(른) 등재(시공사)

인수 후 추진경위

○ 시특법에 따른 안전점검 시행

- 정기점검 : 2017년 상반기부터 실시

- 정밀점검 : 2019년 최초 정밀점검용역, 2021년 정밀점검 용역 시행

- 기타 해빙기점검, 우기대비 점검 등 특정시기 안전점검 실시

○ 지방계약법에 따른 하자검사 시행

- 정기 하자검사(상·하반기) 및 분기별(1,2종) 하자검사 실시

○ 시설물 일상유지보수 및 세척 등 유지관리 시행

- 2017~2019년 일상유지보수 작업(4회 실시)

- 터널 공용중 주기적인 세척 등 유지관리 실시(세척시기 탄력적 운용)

- 시설물 하자사항 발생 시 즉시 시공사에 하자보수 조치

○ *****************************

- ********************************

- *******************

인계 관련 추진사항

○ 2021.6.~9.: 고양시(도로관리사업소), 서울시(도로계획과,도로시설과) 이관 관련 자문 및 협의(유선)

○ 2021.10.27.: 봉산터널 인수·인계에 따른 관련도서 제출 요청

[고양시 → 서부도로사업소(시설보수과) 등]

○ 2021.11.01.: 봉산터널 인수·인계에 따른 관련도서 제출

[서부도로사업소(시설보수과) → 고양시]

○ 2021.11.18.: 봉산터널 인수·인계에 따른 협의(市 도로시설과)

○ 2021.11.29.: 봉산터널 인수·인계 관련 유관기관 회의 합동점검

- (일    시) 2021.12.02.(목) 14시

- (장    소) 은평구 신사동 신사씨티아파트 앞

- (참석기관) 서부도로사업소 시설보수과, 기전과, 고양시 도로관리사업소 도로관리과

○ 2021.12.6.~2022.3.: 봉산터널 인수·인계 관련 유관기관 협의 및 관련자료 회신(추가 협약서, 인수·인계 관련자료 등)

	Ⅲ		시 설 현 황

○ 터널 제원

- 시설물명 : 봉산터널

- 위    치 : 경기도 고양시 덕양구 향동동 ~ 서울시 은평구 신사동

- 시설규모 : 폭 10.5m(편도-차도8.5m,보도2.0m), 연장 서울측-495m, 고양측-475m, 높이 7.2m

- 시공방법 : NATM공법

- 설계하중 : DB-24

- 환기방식 : 자연환기

- 계측사항 : 라이닝응력계 12개소, 간극수압계 8개소, 데이터수집기 4개소(계측시스템 가동중)

- 시설종별 : 2종 터널

- 안전등급 : B (2021 정밀점검 용역)

○ 터널 시공 현황

- 공 사 명 : 신사사거리 ~ 고양시계간 도로개설공사

- 시 행 청 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부

- 공사착공 : 2012. 12. 27.

- 공사준공 : 2016. 09. 26.

- ****************

- 시 공 사 : 현대건설(건설사업관리-신명건설기술공사외 2개사)

- 설 계 사 : 천마기술단

- ***********************

※ 시설물 유지관리에 관한 서울시-고양시 협약사항(2011.10.19.)

▶ 협약서 제4조(업무분담) 제②항 제1호에 의거 터널 준공 후 서울시에서 5년간 유지관리 후 고양시로 인계(2021.9.27.일자)

	Ⅳ		시설물 인계 내용

○ 터널 주요 시설 인계 내용

구 분	서울시 방향	고양시 방향
터널내 보도	A=498.5㎡	보도 : A=478.8㎡
콘크리트 포장	A=3,489.5㎡	A=3,351.6㎡
보도구간 방음벽	H=5.5,L=484m	H=5.5,L=464.3m
터널내 타일붙임	A=2,104㎡	A=1,902㎡
화강석 붙임	서울시구간(신사동측) 갱문 정문 A=280㎡
임시폐쇄시설	2개소	2개소
위치표지판	10개	10개
환기휀	11개소	11개소
소화전	10개소	10개소
기전시설	LED 30W × 172등 터널등 LED 120W × 64등 터널등 LED 80W × 20등 보행등 LED 61등 × 비상조명등	LED 30W × 172등 터널등 LED 120W × 64등 터널등 LED 80W × 19등 보행등 LED 59등 × 비상조명등
기전시설 도로부속물	유도표지판(거리표시) × 9개소 CCTV × 6개소(보3, 차3) CCTV × 2개소(입출구 2) 비상방송스피커 60W × 10개소 무선통신보조설비 × 2개소 차선도색 : 1식	유도표지판(거리표시) × 9개소 CCTV × 6개소(보3, 차3) 비상방송스피커 60W × 10개소 무선통신보조설비 × 2개소 차선도색 : 1식
	배전반 3면 × 1대 비상조명용 UPS 30KVA × 1대 CCTV × 1대(수배전반) 라디오재방송설비 × 1대

○ 준공도서 등 인계자료

인계기관	서류 장부명	책 수	비 고
고양시 도로관리사업소 도로관리과	시설물 인수인계서 준공설계도 점검보고서 하자보증서	2부 2부 4부 1부	A4 A3 A4 A4

	Ⅳ		향 후 계 획

○ **********: 봉산터널 인수·인계 관련 협약일, 인수·인계서 교환 등

- 직인날인(서울시장) 후 1부 고양시 도로관리사업소 도고관리과 송부

○ 2022. 4월중 : 봉산터널 시설물 FMS 이관

○ 2022. 4월중 : 봉산터널 유지관리비(분담금) 정산

***************************

********************************

********************************

- ***********************************

- *******************

▶ ******************************************

**********************

▶ *********************************************

	< 봉산터널 유지관리비(분담금) 정산(‘21.6.9.) 旣 부과 >
- ************************************** - ******************

붙임  1. 봉산터널 위치도 및 현황사진 1부.

2. 「고양화전~신사간 광역도로 개설사업」 터널구간 사업시행 및 시설물 유지관리에 관한 협약서 1부.

3. 협약서[안] 1부.

4. 인수인계서[안] 1부.

5. 봉산터널 유지관리 분담금 산출내역서(최종) 1부. 끝.