문서번호	기전과-20436
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전과장	강서도로사업소장
송정호	김형집	04/04
		김용제
협 조

외발산지하차도 진입차단시설

설치계획 보고

2022. 3.

강서도로사업소

기  전  과

외 발 산 지 하 차 도

진입차단시설 설치계획 보고

외발산지하차도에 진입차단시설을 설치하여 지하차도내 침수 및 화재시 지하차도로 진입하는 차량을 차단하여 2차 안전사고 발생을 방지하고자 함.

▢ 추진근거

○ 도로터널 방재시설 개선계획(도로시설과-1182, 2018.1.31.)

○ 도로터널 방재시설 개선사업 변경계획(도로시설과-8942, 2020.8.6.)

▢ 시설현황

규모	폭	연장		차로수
	20.1m	1,015m		4차로
터널등급	연장 3등급		방재 3등급
주요 기전시설	특고압 및 저압 수전설비, CCTV (16대), 소화기(66대), 배수펌프(4대), 무정전전원설비(2대)

▢ 추진배경

○ 도로시설과의 도로터널 방재시설 개선계획에 따라 방재2등급 수준으로 시설을 보강하고 지하차도 침수시 2차사고를 예방하기 위하여 진입차단시설 및 정보표지판 설치 추진

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 외발산지하차도 진입차단시설, 정보표지판 설치

○ 사 업 비 : 총 590백만원

- 설계용역비 : 18백만원

- 공  사  비 : 572백만원

○ 사업기간 : 2022.03.∼2022. 08.

○ 사업위치 : 외발산지하차도 양방향 입구부

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 방재시설 개선, 시설비

▢ 추진계획

○ 실시설계용역 시행

- 용 역 비 : 17,644천원

- 용역기간 : 착수일로부터 60일

- 계약방법 : 수의계약(추정가격 20백만원 이하인 용역 계약)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항제2호

- 용역사유 : 주변 교통 환경 및 차량 운전자의 시인성을 고려한 진입차단시설의 위치선정 및 구조물의 검토 등 공사 설계에 전문성이 요구됨

○ 추진일정

- 2022. 03. : 실시설계용역 타당성심사 요청 및 용역 발주

- 2022. 06. : 사전절차이행 및 공사발주

- 2022. 08. : 공사준공

▢ 행정사항

○ 실시설계용역 타당성심사(기술심사담당관)

○ 예산재배정 요청(도로시설과)

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출 내역서 1부.