문서번호	건축부-20726
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
박지영		차무흥	04/04
			신명승
협조
	주무관		김예림

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

실정보고 검토결과 보고

2022. 4.

도시기반시설본부

(건축부)

「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」상부 문화재 관련

실정보고 검토결과 보고

엘리베이터측 옹벽설치구간의 궁궐담장 공사와 관련, 기초보강 공사에 대하여 건설사업관리단으로부터 실정보고서가 제출되었기에 그 검토결과를 보고함

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문~원남동 사거리

ㅇ 규    모 : 도로확장(4→6차로), 연장 810m(터널 320m)

- 건축(문화재)공사: 궁궐담장 497m, 북신문 1개소

- 토목공사: 배수로, 승강기, 보행로 및 울타리 / 조경공사: 터널 상부 식재 등

ㅇ 공사기간 : 2010.10. ~ 2022. 6.

ㅇ 총사업비 : 992억원 (건축: 47.5억원)

ㅇ 시공사/건설사업관리단 : ㈜건도 외 2개사/㈜KCI외 1개사

□ 건축(문화재) 잔여 공정

ㅇ 종묘 담장 연결부(1구간, 엘리베이터 옹벽 설치 구간): 37m

ㅇ 창경궁 담장 연결부(2구간, 공사장 주출입구 구간): 49m

ㅇ 북신문 옆 통로(3구간): 14m

ㅇ 기타: 단청, 유구 처리 등

□ 문제점

ㅇ 상기 "1구간"중 엘리베이터측 옹벽과 접하는 약20m은 지반성토 다짐이 미흡하고, 타공정 장비가 상시 점유하고 있어 담장공사를 위한 공간 확보가 불가한 실정임

ㅇ 또한, 4.4(월) 현재 지반 성토는 되어 있으나, 다짐이 미흡하여 지내력이 부족하므로 담장시공 시 지반침하 등 하자발생 우려(시공사 현황보고)

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리단 검토의견에 따라 지내력이 부족한 구간(약20m)의 담장기초를 구조보강하여 조속히 시공토록 업무지시하고자 함

- 지내력이 100Kn/㎡ 이상일 경우: 기초 폭 2.8m, 높이 0.45m

- 지내력이 150Kn/㎡ 이상일 경우: 기초 폭 2.0m, 높이 0.45m

※ 구조보강 내역 : 철근 및 콘크리트 물량 증가 부분으로서, 본 공사내역 범위내에서 설계변경하고자 함

붙임 : 율곡로 도로구조 개선공사 담장기초공사 실정보고 각 1부.  끝.