문서번호	도시철도설비부-20499
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
유홍근		김이곤	04/05
			김중영
협조	송변전과장		전계목
	신호과장		代전성완

진접선(4호선연장) 차량기지 건설

시스템분야 실시설계 중간보고 및 VE 시행계획

2022. 04

도시철도설비부

(정보통신과)

진접선(4호선연장) 차량기지 건설

시스템분야 실시설계 중간보고 및 VE 시행계획

진접선 차량기지 건설 시스템(전력·통신·신호)분야 실시설계 관련 중간보고 및 VE 시행계획을 보고 드림

□ 사업개요

❍ 과업규모 : 차량기지신설 197,400㎡ 종합관리동 및 검수고 등 건물 14개동, 인입선 4.9km, 창동차량기지 지하변전소 1개소

❍ 실시설계 기간 : ‘20.4 ~ ‘22. 6.30

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토)

❍ 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 제48조(설계VE 실시대상) - 총공사비 100억원 이상 건설공사

❍ 서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영 지침

□ 실시설계 용역 현황

분 야		전력(송변전/전차선)	통 신	신 호
계약자		세종기술(주)	㈜안세기술	㈜경인기술
계약 기간	총차	*******************	*******************	*******************
	1차	*******************	*******************	*******************
	2차	*******************	*******************	*******************
계약 금액	총차	*********	*********	*********
	1차	*********	*********	*********
	2차	*********	*********	*********
공정률		***	***	*****

□ 추진계획

<중간보고>

❍ 일  시 : `'22. 04. 13(수) 14:00 ~ 16:00

❍ 장  소 : 도기본 10층 회의실

❍ 참석자 : 도시철도설비부장, 담당 과장님 및 담당자, 분야별 설계용역사

<설계VE>

❍ 추진방법     : 기술심사담당관(설비심사팀) 대행검토

❍ 설계VE 신청 :‘22. 04월 중

※ VE 소요기간 – 신청 후 결과통보까지 약 45~50일

❍ 설계VE 추진 일정

추진절차	추진 내용
사전협의 (4. 08)	- 발주부서(설계사) 기술심사당당관 사전 실무자 협의
VE신청 (4. 13)	- 설계경제성(VE) 신청(신청서, 설명자료, 설계도서) (도시기반시설본부 ⇒ 기술심사담당관)
시행방법 VE팀 구성 및 결정통보 (신청 후 약 15~20일)	- 설계VE팀 구성 등 계획 수립 통보 (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부)
설계VE 검토 및 결과통보 (검토 시작일로부터 약 30일)	- 설계VE 검토 ‣ 사업설명 및 질의응답, 기능분석, 현장답사 ‣ 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정(설계VE팀) - VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부) - VE 제안 채택결과 회신(도시기반시설본부 ⇒ 기술심사담당관) - 설계경제성 심사(VE) 결과 통보(기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부)

□ 향후계획

❍ 실시설계 용역 준공       : `'22.  6.

❍ 총사업비 조정           : `'22.  7. ~  9.

❍ 공사 및 감리용역발주 : '22. 10. ~12. 끝.