문서번호	공원시설과-20249
결재일자	2022. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		공원시설과장		공원부장
이호연		양돈욱		04/06
				김상국
협 조
	주무관				현병철

『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사』

공사 현장 실정보고

2022. 4.

공  원  부

(공원시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사』

공사현장 실정 보고

「2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사」관련하여 여건 변동 및 최종 계획 확정시 변경된 사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고 드림.

□ 관련근거

○ 실시설계용역 완료 및 추진계획 보고《공원시설과-6969호(2021.12.3.)》

○ 하천점용허가 신청에 대한 회신《서울지방국토관리청 하천계획과-6829(2021.12.7.)》

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선공사

○ 공사기간 : '21. 10. 13. ~ '22. 5. 31.

○ 사업규모

*******************************

****************************************

******************

○ 도 급 비 : *************

○ 계 약 자 : ****************

□ 보고내용 및 검토의견

구 분	내 용
양화3,4,5주차장	■ '21년 우선 대상사업 공사 발주시 기존 입·출구 방향에 맞춰 출구차로를 확장(1개차로→2개차로)하고자 하였으나, 올림픽대로측 진입도로에서 진입할 경우 회전반경이 부족하여 이용불편 및 안전사고 위험이 있어 원활한 진출입을 위해 출입구 방향 변경이 필요함 ⇒ 원활한 주차장 진출입을 위해 입출구 위치를 적정 회전반경이 확보되도록 방향을 변경하고자함

구 분	내 용
여의도3주차장	■ 당초 '21년 우선 대상사업 발주시 서강대교측 출구차로만 확장하고자 하였으나 용역 자문회의, 운영자 의견청취 결과 주차장 규모(792면)와 이용률을 감안하여 마포대교측 출구도 확장하는 방안이 출차지연 해소에 보다 효과적이라는 의견이 제시되어 변경 필요 ⇒ 제시된 의견에 따라 마포대교측 출구도 1개차로→2개차로로 확장하고자 함
잠실4주차장	■ 신천나들목측에 설치되어 있는 기존 출구차로를 확장(2개차로 →3개차로)하고자 하였으나, 출구 위치가 나들목과 올림픽대로 진입차선과 만나는 교차지점에 설치되어 있어 차로증설시 효과가 미비하고 혼잡이 가중될 것으로 판단됨 ■ 현재 균형발전본부 동남권사업과에서 추진 중인 탄천·한강변 정비사업 추진시 잠실4주차장 잠정폐쇄 및 이전이 '23년 상반기 시행될 예정으로 사업계획 변경이 필요함 ⇒ 사업효과 미흡 및 사업대상지 관련 개발계획을 고려하여 본 사업에서 제외하고자 함 ⇒ 현재 미운영 중인 출차정산기 2대는 이촌3,4주차장으로 이전하여 설치하고자함
강서임시주차장 (신설)	■ 주차장 신설(64면)에 따른 서울지방국토관리청 하천점용허가 협의결과 사업대상지가 광명~서울 민자고속도로 부지와 중복 되어 민자고속도로 사업 완료 후 재협의토록 회신됨에 따라 사업계획 변경이 필요함 ⇒ 광명~서울간 민자고속도로사업은 '25년 하반기 완료예정으로 금년내 주차장 신설이 불가한 상황으로 본 사업에서 제외하고자 함

□ 조치 계획

○ 상기 보고내용과 같이 여건 변동 반영과 이용편의 및 안전를 위해 변경이 필요한 사안에 대하여 변경하여 추진

○ 원활한 공사추진을 위해 도급자로 하여금 우선 시공토록하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함

※ 본 공사와 병행하여 추진 중인 『2021년 한강공원 주차장 출구차로 구조개선 전기·통신 공사』도 상기 보고내용과 같이 변경하여 추진하고자 함

○ 변경내역

구분	공 종	규 격	단위	수 량			사업비 (천원)
				당초	변경	증·감
합 계							**	******
제경비		순공사비의 140%					**	******
순공사비합계							**	******
잠실4	사업제외		식	*	*	***	***	******
강서 임시	사업제외		식	*	*	***	***	******
여의도3	토공		㎥	**	*****	******	**	******
	배수공		개소	*	**	***
	아스팔트포장		a	***	*****	***
	보도포장		a	*	****	*****
	경계석 및 측구설치		m	*	***	*****
	차선도색		m	***	******	*****
양화 3,4,5	토공		㎥	**	****	******	**	******
	아스팔트포장		a	***	*****	******
	경계석 설치		m	**	**	****
	차선도색		m	***	****	*****

붙임  변경계획도 각 1부.