문서번호	설비부-20839
결재일자	2022. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김진영		김현기	04/06
			代장병선
협조

서울시네마테크 건립 통신공사

준공기한 연장 검토보고

2022.04.

도시기반시설본부

(설비부)

서울시네마테크 건립 통신공사

준공기한 연장 검토보고

건설사업관리단으로부터 제출된「서울시네마테크 건립 통신공사」준공기한 연장 요청에 대한 실정 보고를 검토 후 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

○ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806.11㎡

○ 계약현황

구 분	차 수	계약금액	계약기간	계약업체
통 신	총 차	************	*********************	******
	1 차	***********	*********************

□ 관련근거 : 근정시네 제2022-163호(2022.03.30.)

□ 검토내용

○ 준공기한 연장

구 분	차 수	계약기간		증‧감 (일)
		당 초	변 경
통 신	총 차	*********************	*********************	****
	1 차	*********************	*********************	*****

○ 계약금액 : 변경 없음

○ 준공기한 연장사유

- 선행 공정인 건축공사의 준공기한 연장에 따라 변경된 공정계획에 적합하도록 후속 공정인 통신공사의 준공기한을 연장하고자 함

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 건설사업관리기술자 의견

○ 선행 공정인 건축공사의 공정계획에 적합하도록 통신공사의 준공기한을 연장 시행함이 적정하다고 판단됨.

□ 조치계획

○ 건설사업관리단의 검토보고가 적합하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고, 계약부서로 통신공사 준공기한 연장을 의뢰 하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.