문서번호	기전과-20867
결재일자	2022. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
박근용		김은덕	04/07
			윤방식
협조

『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

실정보고 및 계약변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  4.  7.

동부도로사업소

(기 전 과)

『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』 실정보고 및 계약변경 검토 보고

우리사업소에서 시행하는 『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』 관련하여 계약업체의 실정보고 및 계약변경 요청에 따른 검토를 보고 드림.

□ 추진근거

○ **********************************

- 거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치 실정 보고건

○ 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 제16조 제1항 제4호 (공사기간의 연장)

- 전염병 등의 불가항력 사유 발생 시 시공자로부터 공사기간 연장 요청을 받아 검토

□ 사업개요

○ 사 업 명: 거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 사업위치: 거여본선(송파구 오금동 165-1, 가락동 165-2, 거여동 11-6, 20-14)

○ 취 수 원: 거여본선 지하철 환기구 집수정 내 유출 지하수

○ 사업규모: 총 연장 300m

○ 계약업체: ***************************************

○ 계약금액: *************

○ 계약기간: ***************************

○ 사업내용

- 거여본선 쿨링로드 설치 세부 설계

- 쿨링로드 시스템 물품 제조 및 설치

□ 추진현황

○ 현재 공정률 약 90%

- ‘21. 11. 3. 계약 및 착공

- ‘21. 11. 5. 선금급 지금(계약금액 348백만원 중 244백만원)-70%

- ‘21. 12. 19. 거여본선 도로 위 분사노즐 설치 완료

- ‘22. 3. 26. 도로환경측정스테이션 및 전광판 설치 완료

- ‘22. 4. 1. 집수정 내부 및 외부 배관 작업 완료

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기 사유

- 2022년 3~4월 작업 중 작업자의 코로나19 양성판정으로 인한 작업

- 중단 사유가 발생하여 도로 완전복구(포장) 및 쿨링로드 시운전 등의

- 작업 일정 지연에 따른 준공기간 내 준공이 불가한 실정으로 준공기한

- 연기가 필요함.

○ 준공기한 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	***************************	***************************

○ 계약금액: 변경없음

○ 지체상금 부과여부: 미부과 (천재지변 등 불가항력의 사유)

□ 보고자 검토의견

○ 계약업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 계약업체

의견이 적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 계약변경을

시행하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.