투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(서울시네마테크 건립 통신공사)

우리 부서에서 추진 중인「서울시네마테크 건립 통신공사」의 준공기한(총차 및 1차) 연장을 위한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약현황

구 분		계약금액	계약기간	계약업체
통 신	총 차	************	************************	******
	1 차	***********	************************

2. 변경내용

가. 준공기한 연장(계약금액 변경없음)

구 분		계약금액		준공기한
		당 초	변 경	당 초	변 경
통 신	총 차	************	****	***********	***********
	1 차	***********	****	***********	***********

나. 변경사유

- 건축공사 준공기한 연장에 따른 후속공정(통신공사) 준공기한 연장

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의 각서 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김진영		환경설비과장	김현기		설비부장	04/07
代장병선
협조자
시행	설비부-20941	(	2022.04.07	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지), 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8618	/전송	02)3708-8659	/	kjin0714@seoul.go.kr	/	부분공개(5)