문서번호	정수과-20397
결재일자	2022. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수	정갑평	04/08
		문인기

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설용역 추진계획

2022. 4.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설용역 추진계획

정수처리시설 퇴적토사류의 주기적인 준설로 유충 서식환경 제거 및 정수처리효율을 증대하기 위해 준설용역을 시행하고자 함.

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지 회수조와 배출수지의 퇴적물 준설을 통해 유충 서식환경 제거

※ 배출수지 : 활성탄흡착지 및 여과지의 역세척 배출수를 일시 저장하여 침전 후 상등수를 착수정으로 회수하는 시설

○ 정수처리공정 효율 증대를 위한 준설 : 착수정, 배슬러지지

- 제2정수장 착수정 정류벽 후단과 배슬러지지의 퇴적물은 정수처리공정 기능 저하 및 펌프 등의 시설물 손상 우려를 해소하기 위해 준설.

준설작업(활탄지 회수조 및 배출수지)		준설완료

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 용역

○ 사업기간 : 계약일 ~ 2022. 6. 30.

○ 사업대상 : 활성탄지 회수조 등 총 9개지

○ 소요예산 : ********

○ 주요내용 : 정수처리시설의 퇴적토사류 준설

□ 추진계획

○ 주요과업

- 준설 대상 및 기간(사업기간 중 5.5일)

대상시설	계	활탄지회수조	배출수지	#1착수정	#2착수정	배슬러지지
바닥면적(㎡)	-	486 (54×9)	550 (25×11)	900 (45×10)	112 (8×7)	132 (22×3)
시 설 수(지)	9	1	2	2	2	2
퇴적물높이(m)	-	0.3	0.3	0.1	0.8	0.2
준설기간(일)	5.5	1	1	1	2	0.5

- 준설방법 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설 후 톤백 담기

※ 준설된 퇴적토사류는 별도 폐기물 처리 용역 예정임.

○ 소요예산 : ********

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

- 소요금액이 소액이므로 진공흡입식 준설차를 보유한 업체와 수의계약

○ 수의계약 대상업체

*****************************

*************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 정수비, 정수센터시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수시설 청소 및 준설)

□ 추진일정

○ 2022. 4월	:	용역계약
○ 2022. 4월~6월	:	용역시행
○ 2022. 6월	:	준공

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.

2. 수의계약 요청 사유서 및 퇴직공무원 조회결과 1부.  끝.