문서번호	시설관리과-21424
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
차승환		이승영	04/11
			조임남
협조

설계변경(최종) 심의회 개최 결과 보고

(노량진배수지(1지) 내부방식 공사)

2022. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(최종) 심의회 개최 결과 보고

(노량진배수지(1지) 내부방식 공사)

『노량진배수지(1지) 내부방식 공사』시행 중 발생한 신규공종 및 시공물량 증․감 사항에 대하여 설계변경 사전 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 노량진배수지(1지) 내부방식공사

나. 공사기간 : 2021.06.11. ~ 2022.4.15.

다. 도 급 비 : 485,304,800원

라. 공사개요 : 그라인딩 9,906㎡, 단면보수 835㎡

마. 도 급 자 : ******************

2. 설계변경 근거

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조

(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

나. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 , 행정자치부 예규 제67호

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

3. 설계변경 사유

가) 설계변경 시행근거

□ 공사 실정보고

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1	주휴수당 반영 및 자재반입구/환기구설치	- 건설노동자에 대한 주휴수당 반영 - 자재반입구/환기구 각1개소 설치	⦁공사감독2처-9364 ⦁시설관리과-15124
2	배수지 내부 콘크리트면보수 제외	- 배수지 내부 면갈이 후 확인결과 기존 콘크리트면 양호하여 단면보수 제외	⦁공사감독2처-13347 ⦁시설관리과-20269
4	발생폐기물 처리 외 2건	- 발생폐기물(면갈이 혼합폐기물 69톤) 처리 - 현장사무실 주변 휀스설치(20m) - 배수지 바닥 물청소 추가 시행	⦁공사감독2처-2084 ⦁시설관리과-20615

□ 제경비 등 실 사용에 따른 정산

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	비 고
1	4대 보험료 정산 등	⦁건강, 연금, 노인장기, 퇴직공제비 정산 ⦁고용개선지원비(주휴수당) 정산
2	산업안전보건관리비 정산	⦁실 사용 산업안전보건관리비와 제비율 적용 금액 중 적은금액 적용

나) 주요공정 변경내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
그라인딩		㎡	9,246	9,987	증) 742
단면보수	T=10~50mm	㎡	836	-	감) 836

다) 설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ㆍ 감
도급비	공 급 가 액	441,186,182	322,890,000	감) 118,296,182
	부가가치세	44,118,618	32,289,00	감) 11,829,618
	계	485,304,800	355,179,000	감) 130,125,800

4. 조치의견

가. 상기와 같이 물량 증․감 및 신규공종 발생으로 변경사항이 발생함에

따라 설계변경 심의위원회 심의결과에 의거 붙임과 같이 설계변경을

시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최(노량진배수지(1지)내부방식공사) 1부.

2. 설계변경 심의 요청서(노량진배수지(1지)) 1부.

3. 설계변경 심의 의결서 1부.

4. 설계변경내역서(노량진 배수지) 1부.