문서번호	동북권사업과-20589
결재일자	2022. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	서울아레나팀장	동북권사업과장	균형발전기획관		균형발전본부장
오승수	안규홍	오대중	김승원		04/08
					여장권
협 조
	주무관			정용우

창동운동장 게이트볼장 이전

기본계획 수립 용역 시행계획

2022.  4

균형발전본부

(동북권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

창동운동장 게이트볼장 이전

기본계획 수립 용역 시행계획

서울아레나 건립 부지내 존치된 게이트볼장 이전 관련 공공건축심의위원회 심의 결과 보완 등을 위한 창동운동장 게이트볼장 이전 기본계획 수립 용역에 대해 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진 근거

❍ 2022년도 제1차 공공건축심의위원회 심의결과(도시공간기획과-875, '22. 1. 26.)

❍ 창동운동장 게이트볼장 이전 계획 변경(동북권사업과-20065, '22. 3. 23.)

※ 기술용역 타당성심사 제외대상 : 공공건축 사업계획 사전검토 대상 사업

[“공공건축 사업계획 사전검토(사21-045) 결과 통보”(도시공간기획과-3752, '21. 11. 10.)]

□ 사업 목적

❍ 창동운동장 내 게이트볼장 이전 계획 공공건축심의위원회 심의 결과 재심 의견에 따라 다락원체육공원 게이트볼장 설치계획을 보완하여 사업을 추진

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 창동운동장 게이트볼장 이전 기본계획 수립 용역

❍ 과업기간 : 계약일로부터 90일

❍ 계약방법 : 소액수의계약

❍ 소요예산 : 20백만원(부가세 제외)

- 예산과목 : 균형발전본부 동북권사업과, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 창동·상계 신경제중심지 조성, 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업, 시설비(100-401-01)

※ '22년 예산 편성된 서울아레나 이전 부지 시설 정비(276백만원) 예산 활용

Ⅱ		주요 과업 내용

□ 창동운동장 게이트볼장 철거계획

❍ 동북권체육공원(현, 다락원체육공원) 조성 관련 창동운동장 체육시설 철거공사(2017.12.~2018.11.) 시 철거 제외되어 존치 중인 건축물(게이트볼장, 관리사무소, 샤워장 등) 철거설계 보완방안 제시

□ 다락원체육공원 임시게이트볼장 설치계획

❍ 게이트볼장 철거 및 신축공사 기간 중 이용자 불편해소를 위한 임시게이트볼장 및 임시사무실 설치방안(위치, 형식 및 규모 등) 제시

□ 다락원체육공원 게이트볼장 조성계획

❍ 이용자의 쾌적성을 고려한 규모 및 높이 검토 제시

- 건축물형 게이트볼장 설치 사례 2개소 이상 조사를 통한 다락원체육공원 게이트볼장 설계 및 설치 규모 제시

※ 공원 건폐율 및 시설률 등 규정 만족토록 계획

❍ 적정 공사비 제시

- 서울시 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 검토

- 공사비 정보광장(http://pcae.g2b.go.kr:8044/pbs/psa/psa0000/index.do) 시스템 건축 공사비 검토

- “좋은 건설일자리 만들기” 프로젝트 적정공사비 산정체계 개선 지침 검토

❍ 설계 및 공사 적정 공기 제시

- 공공 건설공사의 공사 기간 산정기준 검토

❍ 공공건축위원회 심의 및 투자심사 자료, 설계공모 지침서 및 기타 과업 목적 달성에 필요한 자료 작성

Ⅲ		향후 계획

❍ 용역 계약 및 착수	: ’22. 4.

❍ 용역 중간 보고	: ’22. 5.

❍ 기본계획 수립 용역 준공(공공건축심의 병행)	: ’22. 6.

붙  임  1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.