“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	계약기간 변경요청(2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립)

우리 부서에서 시행 중인‘2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역’에 대하여 아래와 같은 사유로 용역 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

나. 계 약 자 : ****************

다. 용 역 비 : **************************

라. 계약기간 : 2022. 2. 16. ~ 2022. 4. 16.

2. 계약기간 변경

가. 당    초 : 2022. 2. 16. ~ 2022. 4. 16.

나. 변    경 : 2022. 2. 16. ~ 2022. 5. 16.

3. 변경사유 : 본청 교통소통대책 자문회의 일정이 4월 중순으로 예정됨에 따라 용역 준공기한 연기

4. 지체상금 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기 보고서(합의각서 포함) 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	신중선		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	04/11
최춘근
협조자
시행	급수운영과-21024	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	부분공개(5)