투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통안전시설(신호) 원인자부담공사 공기연장 승인통보(월드컵대교~서부간선 직결램프 설치전기공사)

1. 귀 사(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 교통관리과-15366(2020.07.30.)호

나. 한국신호 KSWS220405(2022.04.05.)호

다. TR-감-22014(2022.04.11.)호

3. 위 호와 관련된 『공사기간 연장 요청』에 대하여 아래와 같이 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 월드컵대교~서부간선 직결램프 설치전기공사

나. 원 인 자 : 도시기반시설본부

다. 공사장소 : 월드컵대교 남단

라. 공사내용 : 교통신호기 설치 1식

마. 연장사유 : 하천점용허가

바. 공사기간 연장내용

구 분	착공일	준공일	비 고
당초	승인일로부터	2022년 03월 31일
변경	승인일로부터	2022년 05월 31일

4. 감리사께서는 기간 내 공사 완료 후 준공검사 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 감리사 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장 (설비부장), (주)트래비스, (주)한국신호
주무관	권기춘		기전과장	04/12
김형집
협조자
시행	기전과-20698	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	kwon700117@seoul.go.kr	/	부분공개(6)