투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(한강교량 속도제한 표지 교체공사-성산대교외 4개소)

1. 기전과-20809(2022. 4. 12.)호와 관련한 내용입니다.

2. 한강교량 속도제한 표지 교체공사(성산대교 외 4개소)와 관련 병행공정(노면표지) 지연으로 인해 사업진행이 어려워 공사기간 연장코자 합니다.

가. 공사명: 한강교량 속도제한 표지 교체공사(성산대교 외 4개소)

나. 공사기간: 2022. 3. 25.~2022. 4. 18.

다. 업체명: ************

라. 계약금액: ************

마. 변경 내용

○ 공사기간 당초: 2022. 3. 25.~2022. 4. 18.

○ 공사기간 변경: 2022. 3. 25.~2022. 5. 6.

바. 변경 사유: 병행공정인 노면표지 공사 지연으로 절대공기 부족하여 공사기간 연장

사. 귀책 소재: 서울특별시 서부도로사업소

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	정영술		기전과장	04/12
최경주
협조자	주무관	장재영
시행	기전과-20818	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8403	/전송	02-300-8410	/	najomboso@seoul.go.kr	/	부분공개(5)