투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장 (도로계획과장)
(경유)
제목	추경예산 확보 협조 요청(국회대로 지하차도 및 산부공원화 사업)

우리 본부에서 시행하고 있는 「국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업」추진과 관련하여 붙임과 같이 2022회계연도 추가경정예산 확보를 요청하오니 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 추경예산 확보의 필요성

- (1단계 및 2단계1공구) 교통전환 등 연계공정 지연에 따른 전 구간 공기지연 및 예산   집행 완료('22.8월) 후 공사 중단 불가피(안전사고 위험)

- (2단계 2공구) 선유고가 철거 공사 중단에 따른 장기적 교통 통제에 따른 시민불편 및 예산집행 완료('22.7월) 후 공사 중단 불가피(안전사고 위험)

나. 추경예산 확보요청 현황(세부내역 별첨)

구 분			‘22년 본예산	‘22년 추경요구액	‘22년 예산합계
총 계			28,256,000	22,742,000	50,998,000
총괄	계(①+②)		28,256,000	22,742,000	50,998,000
	시 설 비 ①	소계	25,356,000	22,531,000	47,887,000
		도급비	19,825,000	20,640,000	40,465,000
		관급비	3,102,807	751,000	3,853,807
		폐기물	1,136,810	640,000	1,776,810
		계측비	1,260,000	300,000	1,560,000
		기 타	31,383	200,000	231,383
	감리비 ②		2,900,000	211,000	3,111,000

붙임  1. 22년 추경예산 확보요청 (산출기초)  1부.

2. 22년 예산(취합본)집행 및 공정(추경요구)계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김소연		방재시설과장	최진우		방재시설부장	04/13
이동훈
협조자	주무관	이시연		주무관	홍민철
시행	방재시설부-20985	(	2022.04.13	)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8, (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8762	/전송	02-3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)