“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	치수과-7738		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장
			고봉균	서명환		민경갑		04/13 정제호
등록일자	2022.4.13.
결재일자	2022.4.13.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 공공하수도의 효율적 유지관리를 위한 -

2022년 공공하수도 GIS DB 구축 용역 시행 계획

	강 남 구
(		치수과	)

▣ 용역개요 ❍ 용 역 명 : 2022년 공공하수도 GIS DB 구축용역 ❍ 용역기간 : 착수일로 부터 2022.12.31.일 까지 ❍ 용역내용 : 2022년 관내 공공하수도 정비구간 서울시 하수도 전산시스템 탑재 - 원형관로 정비구간 : 시설물 조사·측량 및 기준점 측량 등 - 사각형거 정비구간 : 3D라이다 측량, 정위치 편집, 가시화데이터 제작 등 ❍ 용 역 비 : 194,151천원(구비 : 69,309천원, 시비 : 124,842천원) ▣ 시행근거 ❍ 서울특별시 물재생계획과-4339(2019. 3. 27.)호『하수도 GIS DB갱신 입력 철저』 ❍ 서울특별시 물재생계획과-13264(2017. 10 .12.)호『사각형거 보수보강공사 DB구축 시행계획 알림』 ❍ 치수과-1609(2022. 1. 25.)호『2022년 수해예방 사업 등 시행계획』 ❍ 하수도법 제68조의2(공공하수도 정보시스템 구축) ▣ 시행방안 ❍ 2022년 시행중인 원형관로 정비공사 및 사각형거 보수보강공사 GIS DB 구축 ❍ 2022년도 시행중인 사각형거 보수보강 공사 3D라이다 측량 시행 ❍ 2021년 사각형거 보수공사로 인하여 서울시 GIS DB 개선용역 대상에서 제외된 구간 및 불탐구간 3D라이다 측량 시행 ❍ 예산사항 : 2022년 하수도 정비 공사 이전비 사용

2022. 4.  .

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항 • 서울특별시 물재생계획과-4339(2019. 3. 27.)호『하수도 GIS DB갱신 입력 철저』 • 서울특별시 물재생계획과-13264(2017. 10 .12.)호『사각형거 보수보강공사 DB구축 시행계획 알림』 • 치수과-1609(2022. 1. 25.)호『2022년 수해예방 사업 등 시행계획』 • 하수도법 제68조의2(공공하수도 정보시스템 구축)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• GIS DB의 구축을 통해 하수도공사 설계 및 굴착공사시 하수관로(사각형거)의 정확한 자료제공으로 안전사고 예방 및 공공하수도의 효율적 관리
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당사항 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 거주민 및 불특정 시민다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 해당사항 없음
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 공공하수도의 효율적 유지관리를 위한 -

2022년 공공하수도 GIS DB 구축 용역 시행 계획

2022년 하수도 정비공사 및 사각형거 보수보강 공사에 대한 GIS DB 구축 및 3D라이다 측량을 시행하여 안전사고 예방 및 공공하수도의 효율적 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

서울특별시 물재생계획과-4339(2019. 3. 27.)호『하수도 GIS DB갱신 입력 철저』

서울특별시 물재생계획과-13264(2017. 10 .12.)호『사각형거 보수보강공사 DB구축

시행계획 알림』

치수과-1609(2022. 1. 25.)호『2022년 수해예방 사업 등 시행계획』

하수도법 제68조의2(공공하수도 정보시스템 구축)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2022년 공공하수도 GIS DB 구축용역

용역기간 : 착수일로 부터 2022. 12. 31.일까지

용역목적

◯ GIS DB의 구축을 통해 하수도공사 설계 및 굴착공사시 하수관로(사각형거)의 정확한

자료제공으로 안전사고 예방 및 공공하수도의 효율적 관리를 목적으로 함.

대상사업 : 관내 하수시설물 보수공사 외 15건

◯ 하수관로 정비공사 : 관내 하수시설물 보수공사 외 3건

◯ 사각형거 보수공사 : 서운로 일대 저지고수로 정비공사 외 11건

용역내용 : GIS DB 구축, 사각형거 3D 라이다 측량 및 기준점 측량 등

◯ 하수관로 GIS DB 구축 : 6.176km, 기준점측량 : 39점

◯ 사각형거 GIS DB 구축 : 4.726km, 기준점측량 : 2점

◯ 사각형거 3D 라이다 측량 : 6.148km(2021년 서울시 GIS DB 개선 용역 제외구간 1.422km)

용 역 비 : 금194,151,000원(구비 : 69,309천원, 시비 : 124,842천원)

Ⅲ		보 고 내 용

대상사업 및 과업물량

◯ 원형관로 정비공사

	공 사 명	GIS DB 구축 (km)	기준점 (개소)	소요예산 (천원)	비고
1	관내 하수시설물 보수공사	2.300	15	28,989	(구비)
2	세곡동 쟁골마을 우·오수 분류화 공사	1.513	10	19,154	(구비)
3	도산대로38길27외 9개소 하수관개량공사	1.751	10	21,165	(구비) 재난관리기금
4	도곡동 언주초교주변외1개소하수관로 개량	0.526	4	6,992	(시비)

◯ 사각형거 보수보강 공사

	공 사 명	GIS DB 구축 (km)	라이다측량 (km)	소요예산 (천원)	비고
5	서운로 일대 저지고지수로정비(계속)	0.671	0.585	13,393	(시비) 기준점 측량 2개소
6	남부순환로 2807~2907간사각형거 보수	0.160	0.300	8,530	(시비) 탄천하수처리구역 3D 라이다 측량 제외 구간
7	남부순환로 2907~2917간사각형거 보수	0.131	0.280	7,903
8	남부순환로 2917~2935간사각형거 보수	0.176	0.324	9,222
9	논현로 336~논현로71길2간외 1개소 사각형거보수	0.280	1.094	20,743
10	테헤란로 138~역삼로7길2간 사각형거보수	0.250	0.250	4,071	(시비) 탄천하수처리구역
11	논현로10길29~개포로 224간사각형거보수	0.480	0.480	7,817
12	개포로110길21~109길5사각형거보수	0.882	0.882	14,364	(시비) 서남하수처리구역
13	개포로 224~개포로17길32간사각형거보수	0.408	0.408	6,641
14	도곡로21길7~역삼로 128간사각형거보수	0.668	0.668	10,879
15	언주로151길 22 ~ 논현로167길 9간 사각형거보수	0.540	0.540	8,794	(시비) 재난기금
16	논현로167길9 ~ 압구정로144간 사각형거 보수	0.337	0.337	5,488

사업 위치도 : 붙임5. 참조

GIS DB 구축용역 시행방안

◯ 시행방안

- 2022년도 시행중인 공공하수관 정비공사 및 사각형거 보수보강공사 GIS DB 구축

※ 관내 하수시설물 보수 외 15건(연장 : 10.902km, 기준점 : 41개소)

- 2022년 사각형거 보수보강공사 3D라이다 측량 시행

※ 테헤란로 138 ~ 역삼로7길2간 사각형거보수 외 11개소(연장 : 4.726km)

- 2021년 사각형거 보수공사 준공 후 서울시 GIS DB 개선용역 대상에서 제외된

구간의 3D라이다 측량 시행

※ 남부순환로 2807~2907 사각형거 보수공사 외 3건(1.422km)

◯ 예산사항 : 2022년 공공하수도 및 사각형거 정비공사의 공사비 중 이전비 활용

◯ 계약방법 : 제한경쟁입찰(입찰참가자격 제한)

- 입찰참가자격

※ 수치지도제작업 및 지하시설물 측량업을 모두 등록하고 소프트웨어사업자

신고를 필한 업체

※ 공간정보DB구축서비스(세부번호8115169901)로 직접생산확인증명서를 발급

받은 업체

※ 중소기업 또는 소상공인 확인서를 소지한 업체

예산과목

◯ 치수과, 재난없는 안전강남 구현, 하수시설물 유지관리, 관내 하수시설물 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(금28,989,400원)

- 관내 하수시설물 보수공사

◯ 치수과, 재난없는 안전강남 구현, 하수시설물 유지관리, 세곡동 쟁골마을 우·오수 분류화 공사, 시설비및부대비, 시설비(금19,154,500원)

- 세곡동 쟁골마을 우·오수 분류화 공사

◯ 재난안전과, 재난예방 강남 구현, 재난관리 추진(재난관리기금), 재난의 효율적관리, 시설비 및 부대비, 시설비(금21,165,100원)

- 도산대로38길27외 9개소 하수관 개량공사

◯ 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 도곡동 언주초교 주변 외 1개소 하수관로 개량, 시설비및부대비, 시설비(금6,992,700원)

- 도곡동 언주초교 주변외 1개소 하수관로 개량공사

◯ 물재생계획과, 물자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비(금13,393,200원)

- 서운로 일대 저지고지수로 정비공사(장기계속)

◯ 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로 보수보강, 탄천 하수처리구역 사각형거 보수보강, 시설비(금58,288,400원)

- 남부순환로 2807~2907간 사각형거 보수공사 외 5개소

◯ 물재생계획과, 하수시설관리,하수관로보수보강,서남하수처리구역 사각형거 보수보강, 수선유지교체(금31,885,200원)

- 도곡로21길7~역삼로128간 사각형거 보수공사 외 2개소

◯ 안전총괄실 안전총괄과, 재해 및 재난 예방, 재난예방 및 복구, 재난예방, 시설비

및 부대비, 시설비(금14,282,900원)

- 언주로151길22~논현로167길9간 사각형거 보수공사 외 1개소

Ⅳ		향후계획

2022. 4.  : 용역 발주

2022. 5.  : 계약 및 착수

2022. 12. : 준공 및 서울시 하수도전산시스템 탑재

붙임  1. 설계 내역서 1부.

2. 일상감사 결과통보 1부.

3. 계약심사 결과통보 1부.

4. 2022년 수해예방사업 계획 1부.

5. 사업별 위치도 1부.  끝.