투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	새로운광화문광장 조성사업 건설사업관리단 귀중
(경유)
제목	해치마당 내부 미디어월 공사제외 알림 [광화문광장 해치마당 리모델링 공사]

***********************************

2. 위호와 관련「광화문광장 해치마당 리모델링 공사」현장의 내부 미디어월(20㎡) 설치 공정은 광화문광장추진단의 미반영 요청에 따라 공사에서 제외함을 알려드리오니 관련  업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 변경내용

(당초) 해치마당 미디어월(20㎡) 설치 → (변경) 공사에서 제외. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	손남기		의료시설과장	정채문		건축부장	04/15
代정채문
협조자
시행	건축부-21438	(	2022.04.15	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	sng0103@seoul.go.kr	/	부분공개(5)