투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	여의도공원관리사무소장
(경유)
제목	변경계약 체결 통보(여의도공원 생태숲 정비공사)

1. 여의도공원관리사무소-20775(2022. 4. 15.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약긴간 내 공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 여의도공원 생태숲 노후 시설 정비 공사

**************************

다. 계약금액: 금49,200,000원(금사천구백이십만원)

※ 원인행위No: 405

라. 계약기간: 2022. 3. 2.~ 2022. 4. 19.

마. 변경내용: 계약금액 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	44,727,273	48,809,091	4,081,818
	부가세	4,472,727	4,880,909	408,182
	도급공사비	49,200,000	53,690,000	4,490,000

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공 원 운 영 과 장
주무관	김호영		재무팀장	정미숙		공원운영과장	04/15
류기혁
협조자
시행	공원운영과-21454	(	2022.04.15	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로, 243-60	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-300-5512	/전송	02-300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)