문서번호	급수운영과-21362
결재일자	2022. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	代이승우	04/18
		최춘근

설계변경(4차-최종) 심사요청에 따른 보고

(2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사)

2022. 4.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(4차-최종) 심의요청에 따른보고

**********************************************************************************************

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사

○ 공사기간: 2021.04.30. ∼ 2022.05.02.

○ 공사규모: D*****************m

○ 도 급 액: 금***********원

○ 도 급 자: **************

□ 설계변경 사유

○ 시공물량 물량변경 및 신규공정 등

- 시공물량 변경[콘크리트 포장절단(200mm 이하)] 등

- 신규공정 추가[부단수활정자관부설및 접합공(1000mm)] 등

□ 설계변경 내역(도급비 *****% 증액)

(단위: 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증·감
도 급 비	***********	*************	************
공 급 가 액	***********	***********	************
부가 가치세	**********	**********	***********

□ 향후계획

○ 계약 물량 증·감 발생에 따른 계약금액 변경(******)으로 본부 안전조사과에 설계변경 심사요청하고자함

붙임  설계내역서 1부.  끝.