문서번호	홍보민원과-20635
결재일자	2022. 4. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		홍보민원과장	경영관리부장
김규택		이창훈	04/18
			정덕영
협조

-아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역-

실정보고서 접수에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  4.

상수도사업본부

(홍보민원과)

- 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역 -

실정보고서 접수에 따른 검토보고

「아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역」관련 과업내용 변경 및 기간연장 사항 실정보고에 대한 검토내용을 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 아리수나라 홍보 콘텐츠 리뉴얼 용역

○ 용역기간 : ’21. 9. 27.~ ’22. 4. 26.

○ 용역내용 : 전시·체험물 설계 및 제작·설치

○ 용역업체 : 주식회사 플러스스페이스 ******

○ 계약금액 :***********************

□ 보고요지

○ 자문회의·중간보고회 및 현장점검시 홍보관 콘텐츠 개선의견 반영으로 기존 2D 영상을 FUII 3D 인테렉티브 입체영상으로 변경, 홍보관 전시 환경 보완을 위한 전시 조명, 도색, 그래픽 시트 보완 사항임

- 용역비 증·감 :***********

○ 안전한 체험을 위한 어린이 체험물 안전검사를 위한 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘21.9.27. ~’22.4.26.	‘21.9.27.~’22.6.10.	시설 설치검사 기간 반영

□ 과업변경(기간연장) 적정성 검토

○ 콘텐츠(2D영상⇒ 3D 인터렙티브 체험 영상) 변경

- 3D 인터렙티브 체험 영상은 당초 과업에 포함되어 있지 않은 사항으로,

자문회의 및 중간보고회 의견이 반영됨

- 아리수나라 메인 콘텐츠인 영상관을 체험 결합형 인터렙티브 영상으로 변경하여 어린이들에게 환경적 가치와 수돗물의 소중함을 시각과 경험을 연계한 시너지 효과를 기대할 수 있음

	< 자문회의, 중간보고회 주요내용 >
【자문회의, ‘21.11.18.】 □ 영상체험(인터렉티브)관은 바닥과 벽체 모두를 활용하여 효과 극대화 필요 □ 물밖/물속 공간에서 직접 미션 수행하는 상황 연출을 통해 메시지 전달 필요 □ 인터렉티브 체험 영상관 변경시, 영상관 위치를 1층으로 배치하면, 신체 놀이와 영상 체험으로 시너지 창출 가능 【중간보고회, ‘21.12.20.】 □ 영상관은 3D 입체화 영상 구현 및 가급적 최신 트랜드와 고품질 콘텐츠 반영 토록 구성 ⇒ 추가예산 반영 (※ 본부장님 요청사항)

○ 전시환경(전시 조명, 도색, 그래픽 시트) 보완

- 현장점검(‘22.2.24.) 시 발주처의 의견이 반영된 내용임

• 준공 후 12년간 리뉴얼이 이루어지지 않아 일부 작동불량 전시조명, 변색된

전시시설 도색, 그래픽 시트 교체 필요

- 전시·체험물의 통일성, 업무수행의 효율성을 고려하여 본 용역에 포함하여

일괄 진행

○ 계약기간 연장사항

- 관련 법령 검토 결과 시설 인도 전 안전검사 기관의 설치 검사를 실시하도록 규정되어 있어 검사 소요일수(약 45일) 만큼 기간 연장

	< 관련 규정 >
<어린이놀이시설 안전관리법> 제11조(어린이놀이시설의 설치) 어린이 놀이시설을 설치하는 자는 어린이제품 안전 특별법 제 17조에 따라 안전인증을 받은 어린이놀이기구를 행정안전부장관이 고시하는 시설기준 및 기술기준에 적합하게 설치하여야 한다 제12조(어린이놀이시설의 설치검사) ①설치자는 제11조의 규정에 따라 설치한 어린이놀이시설을 관리주체에게 인도하기 전에 대통령령이 정하는 방법 및 절차에 따라 안전검사기관으로부터 설치검사를 받아야 한다.

○ 검토결과

- 과업내용 변경은 자문회의, 중간보고회, 현장점검을 통해 전문가 및 발주처 의견이 반영된 사항임

- 아리수나라 메인 콘텐츠인 영상관을 최신 트렌드를 반영한 고품질 콘텐츠로 변경, 노후화된 홍보관 전시환경 보완에 관한 사항으로 본 용역수행의 효과성, 효율성을 고려할 때 적절하다고 판단됨

- 계약기간 연장은 관련법률 검토 결과 법정 절차 이행사항에 관한 사항으로, 기간연장 함이 타당함

□ 금액변경 적정성 검토

○ 용역비 증·감 현황

- 영상 콘텐츠 변경(2D영상 ⇒ 3D실감형 체험 영상)

(단위:천원)

연 번	구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
	합 계	*******	*******	*******
1	전시영상장비	******	*******	*******	2D 웹툰영상 장비 ⇒ 3D 실감영상, 인터렉티브 체험 장비로 변경 [빔프로젝터5, PC2, IR카메라, 스피커 등]
2	전시영상SW	*******	*******	*******	2D CG 초급 영상 ⇒ 3D CG 고급 영상으로 변경 [FULL 3D 실감영상 5분, 1식]
3	전시정보영상	******	******	******	바닥 인터렉티브 체험 영상물 추가 [체험형 영상 5분, 1식]

- 전시환경(전시 조명, 도색, 그래픽 시트) 보완

(단위:천원)

연 번	구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
	합 계	*******	*******	*******
1	전시시설물	*******	*******	******	전시시설 도색 추가 [면적:387.98㎡×63,180원]
2	전시연출조명	*****	******	******	전시조명 교체 추가 [150개×158,010원]
3	전시설명패널	******	******	******	그래픽 시트 교체 추가 [348.67㎡ × 186,340원]

○ 검토결과

- 변경금액에 대한 각 부문별 제조원가, 설치원가, 용역원가에 대한 검토 완료

- 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등에 대한 재료 소요량, 일위대가, 노무단가, 간접노무비율, 경비배부율, 일반관리비 비율, 이윤한도율 등 모두 적정함

○ 예산확보 방안

- 주요 증액 사유는 콘텐츠 변경 등에 관한 사항으로, 당초 계약금액 950백만원 대비 450백만원(47.4%↑) 증액 필요

- 예산변경, 추가경정 예산 등 별도의 예산편성 절차는 용역기간내 현실적으로어렵다고 판단되는 바, ‘22년도 홍보사업비 조정을 통해 가용 예산을 활용하고자 함

- 사업조정 내역

(단위:천원)

연 번	사업내용	당 초	조 정	증 감	비 고
	합 계	*******	*******	*******
1	광고송출	*******	*******	*******
2	사업소 외벽 홍보 슬로건 정비	******	*	******

※ 예산과목 : 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비(시민과 소통하는 아리수 홍보)

□ 조치의견

○ 상기와 같이 영상 콘텐츠 변경 및 홍보관 전시환경 보완 사항은 홍보관 콘텐츠의 질적 향상을 위한 전문가 및 발주처의 의견이 반영된 사항으로, 해당 용역사의 실정보고건은 타당하고 용역계약 일반조건에 적정함

○ 용역사의 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차를 이행하고자 함

붙 임 : 실정보고 검토요청 공문 1부.  끝.