투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통안전시설(신호) 원인자부담공사 실정보고(설계변경)에 대한 승인통보(경인고속도로입구 교차로)

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 교통관리과-25793(2021.11.17.)호

나. 설비부-20414(2022.03.30.)호

다. 한종 국회 2022-170(2022.03.29.)호

3. 위 호와 관련된 『설정보고(설계변경)』에 대하여 아래와 같이 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 경인고속도로입구 교차로 교통신호기공사(전기공사)

나. 원 인 자 : 서울시 도시기반시설본부

다. 공사장소 : 서울시 영등포구 양평동 선유고가차도 하부 교차로

라. 공사내용 : 교통신호기 신설 및 이설

마. 변경(연장)사유 : 현장여건 반영한 물량변경 및 선행공정 지연에 따른 공사기간 변경

바. 변경내용

공 종	당초	변경	비 고
차량신호등 설치	1	2	선유고가 2단계 공사 물량 추가
지주부착대 설치	0	1	차량신호등 부착대가 철거공사에 간섭되어 교체
공사기간 변경	2022 3.31	2022 6.30	토목공사 발주 지연으로

4. 감리사께서는 기간 내 공사 완료 후 준공검사 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장 (설비부장), (주)한국종합기술, (주)대영디엔에프씨
주무관	권기춘		기전과장	04/19
김형집
협조자
시행	기전과-20872	(	2022.04.19	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	kwon700117@seoul.go.kr	/	부분공개(7)