문서번호	시설과-20657
결재일자	2022.04.21
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
시설관리팀장		시설과장
김현태		04/21
		代하종식
협 조

서울숲 나비사육장 조성사업(전기)

실정보고에 대한 검토 보고

2022.  4.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

서울숲 나비사육장 조성사업(전기) 실정보고에 대한 검토 보고

「서울숲 나비사육장 조성사업(전기)」와 관련하여, 시공사로부터 실정보고에 대한 적정성 검토 결과를 보고합니다

1		공사 개요

○ 공 사 명: 서울숲 나비사육장 조성사업(전기)

○ 공사위치: 곤충식물원 지하 1층

○ 공사기간: 2022. 4. 18. ~ 2022. 5. 12.

○ 공사내용: 전등 설치와 분전함 설치

○ 계약금액: 금19,700,000 원

○ 계약업체: (주)경당이앤씨

2		실정 보고

○ 설계변경 금액

구 분	금 액[원]		증/감 금액[원]
	변경 전	변경 후
총공사비	19,700,000	21,065,000	증 1,365,000
공급가액	17,909,091	19,150,000	증 1,240,909
부가가치세	1,790,909	1,915,000	증 124,091

○ 주요 실정 보고

공종	변경 전	변경 후	변경 사유	증/감 금액[원]
전등 설치	135등	174등	전등 수량 증가	증 1,151,878

3		검토 의견

○ 시공사 실정 보고 내용 검토 결과

- 나비사육장 운영관리자의 전등 추가 설치 요청으로 인한 작업 물량 증가와 제경비 정산 등을 반영

○ 시공사 실정 보고를 검토한 바, 적합한 것으로 판단되어 승인 통보하고 설계 변경 계약을 시행하고자 함

4		향후 계획

○ 2022. 4.	설계변경 계약 의뢰

○ 2022. 5.	공사 준공

붙임  실정보고서 1부.  끝.