문서번호	설비부-21650
결재일자	2022. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이지영		김현기	04/21
			김호성
협조

서울시네마테크 건립 소방공사 준공기한 연장 검토보고

2022.04.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 소방공사」

준공기한 연장 검토보고

건설사업관리단으로부터 제출된 「서울시네마테크 건립 소방공사」준공기한 연장 요청이 있어 검토 후 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 소방공사

ㅇ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

ㅇ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806.11㎡

ㅇ 계약현황

차 수	계약금액	준공기한	계약업체
총 차	**************	***********	**** ****
1 차	***********	***********

□ 관련근거 : 근정시네 제2022-193호(2022.4.12.)

□ 검토내용

ㅇ 준공기한 연장

차 수	당 초	변 경	증‧감(일)
총 차	***********	***********	****
1 차	***********	***********	*****

ㅇ 계약금액 : 변경 없음

ㅇ 준공기한 연장사유

- 선행 공정인 건축공사의 준공기한 연장에 따라 변경된 공정계획에 적합하도록 후속 공정인 소방공사의 준공기한을 연장하고자 함

ㅇ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 건설사업관리기술자 의견

ㅇ 선행 공정인 건축공사의 공정계획에 적합하도록 소방공사의 준공기한을 연장 시행함이 적정하다고 판단됨

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리단의 검토보고가 적합하다고 판단되므로 총무부로 소방공사 준공기한을 연장 의뢰 하고자 함

붙임 :  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.