코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울물재생시설공단이사장
(경유)
제목	서남물재생센터 슬러지 건조시설 2단계 사업 추진 철저

1. 서남물재생센터 슬러지 건조시설 2단계 사업 관련입니다.

2. 서남물재생센터 슬러지 건조시설 2단계 설치사업은 '20. 8. 20. 착공 '22. 3월 준공을 목표로 공사를 진행하였으나, 슬러지 건조시설의 효율성을 높이기 위한 일부 시설의 보완으로 공사 기간이 연장되었으며,

3. 건조시설의 준공은 시운전을 3개월간 하고 '22. 5월 준공 운영하는 것으로 계획(보고)된 사업입니다.

4. 물재생센터의 슬러지 처리를 위한 중요시설로 계획된 일정까지 시설을 준공하여 슬러지를 차질이 없이 처리할 수 있도록 공사 마무리에 최선을 다해 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병용		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	04/21
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-21144	(	2022.04.21	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, (서소문동) 물순환안전국 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/	kby7965@seoul.go.kr	/	대시민공개