“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의회 개최(월계배수지(3지)내부방식공사)

1. 공사감독2처-2722(2021.4.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 시행중인 “월계배수지(3지)내부방식공사”에 대하여 설계변경 심사서류가 접수되어 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감 사항을 검토후 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 월계배수지(3지)내부방식공사

◎ 도막식 방수방식 : 10,634㎡ (관급자재)

◎ 패널식 방수방식 :  3,793㎡ (관급자재)

○ 주요 신규 및 물량 증 ⦁ 감 공종

공종	규격	단위	당초	변경	증·감	비고
그라인딩	콘크리트면+ 페인트면	㎡	6,146.6	8,447.9	증) 2,301.3
그라인딩	콘크리트면+ 페인트면존치	㎡	2,634.3	-	감) 2,634.3
그라인딩	콘크리트면(벽체)	㎡	-	2,016.6	증) 2,016.6
폼타이제거 단면보수	T=30mm, ø=50mm,벽체	개소	5,000	3,781	감) 1,219
균열주입보수(습식)	B=0.3mm, t=150mm	m	800	721.3	감) 78.7
콘크리트치핑	소형브레이커	㎡	1,683.7	1,182.1	감) 501.6
단면보수	벽체, T=10mm	㎡	432.6	410.0	감) 22.6
단면보수	벽체, T=20mm	㎡	1,068.6	713.3	감) 355.3
단면보수	벽체, T=30mm	㎡	162.5	40.3	감) 122.2
철근방청단면보수	벽체, T=30mm	㎡	20.0	18.4	감) 1.6
죠인트보수	수밀코킹, 단면보수, 에폭시시트마감	식	-	1	증) 1
고압물청소	1회(14,427.6㎡)	회	2	3	증) 1

○ 계약기간 : 2021.05.24 ~ 2022.04.29

○ 도 급 비 : 861,558,760원

○ 계약업체 : 지에스성신건설㈜    대표 박준구

○ 설계변경으로 인한 금액변경(관급자재비 제외)                   단위)원

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	783,235,237	767,600,000	감) 15,635,237
	부가가치세	78,323,523	76,760,000	감) 1,563,523
	계	861,558,760	844,360,000	감) 17,198,760

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2022. 04. 22(금) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

****************

*******************************************************

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

붙임  1. 설계변경 사유서(월계배수지(3지)내부방식공사) 1부.

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 총괄내역서(월계배수지)-사업소 1부.  끝.

급수관리팀장	최용진		급수운영과장	04/22
이승완
협조자	주무관	이태화		주무관	안윤자		주무관	박상권
급수운영팀장	이문성
시행	급수운영과-21839	(	2022.04.22	)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935, 4층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	sieunyoonho@seoul.go.kr	/	부분공개(7)