투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전체 예정공정표(15회) 변경 승인 알림)

1. 업무지시현장 : 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 지에스건설 주식회사, 신림~봉천

터널 도로건설공사(2공구) 주식회사 신성엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2022-04-18 13:04:56

3. 지 시 내 용

가. 신봉감 22-1205호(2022. 4. 14.)와 관련입니다.

나. 전체 예정공정표(15회)에 대하여 변경 승인처리함을 알려드립니다.

1) 주요 변경내용

- 2022년도 계획예산 변경 : 당초 450억원 → 변경 104억원

- 전기•기계설비 공정 투입시기 조정(설비부 별도의견없음)

- 계약 완료된 2022년분 공정률 반영하여 전체 예정공정표 수정

다. 아울러, 사업추진계획 변경(도로계획과)과 관련하여 예산집행에 차질이 없도록 사업관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 전체 예정공정표 변경(15회) 승인요청 1부.  끝.

주무관	이승훈		터널건설과장	04/22
장종환
협조자
시행	토목부-22000	(	2022.04.22	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개