투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통안전시설(신호) 원인자부담공사 실정보고에 대한 승인통보(영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사)

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 도로과-7987(2022.04.22.)호

나. 대영전기감GE 22C-04-13(2022.04.22.)호

3. 위 호와 관련된 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인함을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사

나. 원 인 자 : 서울시 영등포구청

다. 공사장소 : 영등포역 북측 광장

라. 공사내용 : *********************************

마. 변경사유 : 공사구간내 보도블럭 포장 복구 시공 및 물량 변동 발생

바. 변경내용

공 종	당초	변경	비 고
지주 기초블럭 포장	1	0	보도블럭포장(시공사→관리청)변경
전선관 배관	30	1	가로등 통합위치가 근접
전원 케이블	30	1	가로등 통합위치가 근접

4. 감리사께서는 기간 내 공사 완료 후 준공검사 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 기술검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	영등포구청장 (도로과장), (주)대영유비텍, (주)다옴건설
주무관	권기춘		기전과장	04/25
김형집
협조자
시행	기전과-21059	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	kwon700117@seoul.go.kr	/	부분공개(7)