문서번호	기전과-21591
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이희수		이지영	04/25
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토

서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구) 중 교통신호기 원인자부담공사 준공일 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)

○ 공사위치 : 송파구 장지동 434번지 일원

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 11. 30.

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공
신 호	******** *******	****** *********	********	*********

○ 원인자 및 업체현황

검토내용

○ 규제심의

연번	공사장소	관련문서	승인여부	비고
1	A1-10BL 아파트, 특전사 입구	교통관리과-17352호 (2014. 6. 25.)	승인
2	파인타운단지 도로신설에 따른 교통시설물 공사	송파경찰서 교통과-14185호 (2016. 10. 14.)	승인
3	장지동길 도로개설공사	송파경찰서 교통과-16625호 (2017. 12. 12.)	승인
4	위례지구 택지 3공구 임시도로 개설공사	송파경찰서 교통과-5426호 (2018. 5. 3.)	승인
5	마천 뉴타운 재정비촉진지구 반영	송파경찰서 교통과-14224호 (2018. 11. 2.)	미승인
6	위례신도시 3공구 내 장지동 위례서로 (임시 개통도로)1,18,20,21,22,25번 교차로	교통관리과-6513호 (2020. 4. 3.)	미승인
7	위례서로 260	송파경찰서 교통과-12394호 (2020. 10. 27.)	미승인
8	마천로 거여삼거리~마천동 317-12	송파경찰서 교통과-12394호 (2020. 10. 27.)	미승인
9	복정역 출입구 신설에 따른 공사	교통관리과-21141호 (2021. 9. 28.)	미승인

○ 변경사항 : 추가 규제 심의사항에 따른 설계변경

연번	구 분	수량			비 고
		변경 전	변경 후	증•감
1	교통신호 제어기 신설	13	28	15
2	신호등(보/차), 음향신호기 등	312	497	185
3	지주(보/차) 등	200	295	95

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여야 하며, 변경사항 (교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 공사구간내 가공케이블은 지중화를 원칙으로 설계, 부득이한 경우 사유서 또는 실정보고서 첨부하여야 함

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 및 지주내 가로등  안정기실과 신호점검구는 별도 분리 설치

- 지주는 수직으로 건주하여야 하며, 바닥면에서 2m까지 광고물 부착 방지 시트 설치 색상은 기와진회색(NCS S 7502-Y)으로 시공하여야 함

- 음향신호기 버튼 반경 30cm 이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이 없도록 설치

- 음향신호기의 경우 IoT기능이 있는 것으로 설치

- 한국전기설비규정(2022. 1. 1. 개정)에 부합하는 전선식별 색상의 케이블 사용

- 교차로 및 단일로 횡단보도상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 설치

- 기타 사항은 경찰청「교통신호기 설치․관리 매뉴얼」, 서울특별시「교통신호기공사 업무처리 가이드라인」준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

********에서 시행하는 서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구) 관련 교통신호기 원인자부담공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장   확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본(별첨) 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 변경승인 요청 공문 및 감리사 서류 1부.  끝.