문서번호	기전과-21056
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
권기춘		04/25
		김형집
협조

영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사 원인자 부담공사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4

강서도로사업소

(기전과)

『영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

도로과-7987(2022.04.22.)호

대영전기감GE 22C-04-13(2022.04.22.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사

원 인 자 : 서울시 영등포구청

공사기간 : 승인일 ~ 2022. 06. 30.

공사장소 : 영등포역 북측 광장

공사개요 : 교통신호기 철거 1본, 교통신호기·가로등 통합지주 설치 1본

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	주요 설치내용
신호기	******	******	*******	- 교통신호기 철거 및 설치

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 공사구간내 보도블럭 포장 복구 시공 및 물량 변동 발생

변경내용

공 종	당초	변경	비 고
지주 기초블럭 포장	1	0	보도블럭포장(시공사→관리청) 변경
전선관 배관	30	1	가로등 통합위치가 근접
전원 케이블	30	1	가로등 통합위치가 근접

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임  1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝