문서번호	주택정책과-21935
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	임대주택관리팀장	주택정책과장
이정현	허지숙	04/25
		김선수

재개발임대 남산타운 임대관리동 승강기 설치

2022. 4.

주택정책실

(주택정책과)

재개발임대 남산타운 임대관리동 승강기 설치

남산타운 임대관리동의 승강기를 설치하여 시각장애인 및 고령자 입주민의 안전하고 원활한 이동편의 도모

1		설치개요

□ 남산타운 현황

❍ 규    모 : 42개동(분양 35, 임대 7)

❍ 세 대 수 : 5,150세대(분양 3,116, 임대 2,034)

❍ 입주시기 : 2000. 8월

□ 설치 필요성

❍ 임대관리동 외측 승강기 고장 및 수리 불가로 이동불편 발생(’21. 6. 22.)

- 임대관리동은 아파트 입구에 위치(지하1층~지상3층, 연면적 2,542.43㎡)

- ’09년 임대관리동 외벽에 설치·고장난 승강기는 공급중단 모델로 수리 불가

❍ 남산타운 거주 시각장애인 국가인권위원회에 이동권 확보 진정(’21. 6. 30.)

❍ 중구 주택과 남산타운 임대관리동 승강기 민원 처리 요청(’21. 8. 4.)

➡	남산타운 임대아파트는 매봉산 경사지에 위치하여 아파트 단지 출입구와 상당한 레벨차이가 있어 승강기 설치가 필요

임대관리동 전경	기존 승강기(옥상, 연결통로)

2		그간경과

❍ ’21. 7.~10. : 승강기 설치 위치, 구조 안전성 등 전문가 자문

❍ ’21. 10.~12. : 관계기관(市 주택정책과, 중구 주택과, SH공사)

승강기 설치 위치, 건물 구조진단, 어린이집 이전 등 논의

******************************************

***********************************************

*********************************

3		승강기 설치

□ 사업범위

① 승강기 설치 설계용역 : 어린이집 이전 전 시행해 공기 단축*************

- 신규 승강기 및 단지와 연결통로 설치

- 외벽에 설치된 고장 승강기 및 기존 연결통로 철거

- 신규 승강기와 연결통로 설치에 따른 건물 구조 보강

② 기존 임대관리동 외벽 고장난 승강기 및 연결통로 철거************

- 출입구 및 연결통로 방치로 인한 안전사고 발생 방지

③ 임대관리동 건물 내 신규 승강기 및 연결통로 설치*************

1층 어린이집	기존 승강기(건물 후면, 기초부분)

□ 추진절차

계획수립	□	설계용역 **********	□	공사용역 발주 **********	□	공사시행 및 준공
*******		*********** ***********		**********		*********** ************

4		예산확보

□ 소요예산 : *********************************************

(단위: 천원)

내 용	설계용역	기존 승강기 철거	구조보강	승강기 설치
***	*******	*******	*******	*********

□ 예산확보

*************************************

********************************************************

********************************************

5		행정사항

□ 남산타운 승강기 설치계획 통보(市)                : ’22. 4.

□ 기존 승강기 철거시까지 사고 방지위한 안전조치 시행   : ’22. 4~

(SH공사, 중구 주택과, 중구주거안심종합센터)

□ 공동주택 행위허가 기준에 따라 입주자 동의절차 진행   : ’22. 4~

(SH공사, 관리주체)

□ 남산타운 승강기 설치 설계∙공사 추진(SH공사)       : ’22. 5~

□ 남산타운 임대관리동 어린이집 이전 협조(중구 주택과) : ’23. 2.